문서번호	급수운영과-10174
결재일자	2021. 5. 14.
공개여부	부분공개(5)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
조봉구		이상환		05/14 유동수
협 조	주무관
	박윤선

직원교육 일지

교육일시

2021년 5월 4일(화)~5월 14일(금)

교    관

급수운영과장

교육대상

급수운영과·시설관리과·공단감독 총괄담당자(5월4일 대면교육) 및

급수운영과·시설관리과 단위공사 담당자 8명(비대면 온라인교육)

교육제목

서울시설공단 상수도 공사감독 운영 및 안전관리 교육

- 근거: 서울시설공단 상수도 공사감독 대행사업 지도·점검 결과 알림(누수방지과-4202)

교육내용

❏ 감독대행사업 지도점검 본부점검 지적사항

○ 공사착공 사전준비 미비로 인한 준공기한 연기 발생

○ 단수계획 승인 미조치, 현장실정보고 검토결과 미통보

○ 최종 설계변경 승인 요청에 대한 검토결과 미통보

❏ 교육내용

○ 공사착공 사전준비 철저로 준공기한 내 공사 완료

- 교통소통대책 수립 및 도로굴착허가 및 유관기관 협의 이행

- 관급자재 조달구매 기간 감안하여 사전 구매 요청

○ 공사계약 통보 시행

- 공사 계약시 공단에 공사계약 통보하여 조기 착공 시행

○ 단수계획, 현장실정보고 검토결과, 설계변경 승인 통보 철저

○ 안전사고 및 재해예방 철저

○ 교육사진(5월 4일)