코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보도공사 품질 및 안전 관리 철저

1. 시민의 보행안전을 위해 많은 노력과 관심을 가져 주신데 대해 진심으로 감사드립니다.

2. 우리 시에서는 보도공사 시공품질 향상과 시민의 안전한 보행환경을 조성하고자 보도공사 설계지도 점검과 공사장 상시점검을 시행하고 있습니다.

3. 최근 보도공사장 시공품질 및 안전관리 미흡에 따른 민원 등이 발생하고 있는 바, 자치구 보도관리 부서에서는 다음 사항을 중점 관리하여 주시고, 보도공사 관계자(기관)의 교육과 규정 안내에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 보도공사 품질관리 철저

- 기층 및 모래안정층, 줄눈재 포설 전 골재 품질확인(기준미달 반입불가)

- 경계석 설치 전 거푸집 설치, 앞채움 기초 콘크리트 시공 폭(10㎝) 준수, 미끄럼 저항기준 적합 자재사용, 줄눈간격(5~10㎜) 준수, 횡단보도 경사석 연장 확대(1→2m) 적용

- 측구 설치 전 기초 바닥면 다짐 및 고르기, 거푸집 설치, 물고임 없도록 종·횡단경사 관리, 콘크리트 물타기 금지, 수축·팽창줄눈 시공, 타설 후 습윤양생 철저

- 블록포장 자재 검수(시험성적서, 돌기 유무 확인) 철저, 블록간 줄눈간격(2~3㎜) 유지 및 모래충진 철저, 평탄성 확보, 조각블록 사용금지, 전동절단기 사용 등

- 특히 시설물(볼라드, 가로등, 전주, 각종 지주 등) 기초부분 주변 국부 다짐 및 포장마감처리가 불량한 부분은 우선적으로 정밀시공(마감자재 사용 등) 철저 이행

- 장애인 점자블록 설치기준 준수(감독관 시공지도 및 확인철저)

○ 공사장 안전관리 철저

- 현장 관리자 상주하여 안전관리 및 시민 불편사항이 없도록 조치 철저

- 임시보행로 확보 및 동선안내(표지판 등) 철저, 보행안전도우미 배치(임무준수), 작업공간 안전펜스 및 가림막 설치, 보행매트 및 횡단발판 설치, 자재·장비류 폐합관리, 발생폐기물 즉시 반출, 줄눈모래 채움 후 남은 모래는 깔끔하게 청소

4. 향후 보도공사장 점검 시 시공 불량 및 안전관리 미흡으로 불이익(벌점, 과태료부과 등)을 받지 않도록 법령 및 규정 숙지, 현장 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(도로과,토목과,도로관리과,도로시설과)
주무관	최재훈		보도관리팀장	유은중		보행정책과장	05/17 이상국
협조자	주무관	오규형
시행	보행정책과-6183	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 6층	/
전화	02-2133-2391	/전송	02-2133-1052	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	대시민공개