문서번호	도로보수과-4425
결재일자	2021. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
황태선		최완	05/17 이화신
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

3차 작업지시 계획보고

[2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)〕

2021. 5.

북부도로사업소

(도로보수과)

3차 작업지시 계획보고

[2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)〕

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사기간 : 2021. 1. 28. ~ 2021. 12. 31.

○ 시 공 사 : *************

○ 총공사비 :*************

□ 3차 작업지시 개요

○ 청결하고 쾌적한 도로 환경 및 교통사고를 사전에 예방하고자 보도블럭 시공 및 교통부속물(갈매기표지, 도로반사경, 시선유도봉 등)설치를 시행하고자함.

- 작 업 기 간 : 2021. 5. 18. ~ 6. 7.

- 작 업 위 치 : 강북구 도봉로 외 4개 노선(노원로, 정릉로, 월곡로, 한천로)

- 정 비 내 용 : 교통부속물 설치 및 보도블럭 공사

- 정 비 물 량 :

○ 작업지시 내용

연번	시설물명	위 치	작업지시 물량			작업 조건		비 고
			공 종	수 량	단 위	주	야
1	보도블럭	강북구 도봉로 (미아역~수유역)	보도블럭 설치	49.41	㎡	○
2	갈매기표지	노원구 공릉터널 주변	갈매기표지 설치	12	개	○
3	도로반사경	국민대 앞, 북악중 앞	도로반사경 설치	2	개	○
4	무단횡단금지시설	하월곡동 34-1	무단횡단금지설 설치 및 철거	17	경간	○
5	시선유도봉	노원구 공릉터널 주변	시선유도봉 설치	276	개	○
6	도로표지병	강북보건소~ 번3동주민센터교차로	도로표지병 설치(양면)	202	개	○

○ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구분	계약금액	기 작업지시	금회 작업지시	잔 액	비 고
도급비	309,726	157,586	27,346	124,794
관급비	20,000	-	-	20,000
이전비	22,204	11,916	-	10,288
총공사비	351,930	169,502	27,346	155,082

□ 조치계획

○ 제3차 작업지시 통보 및 시행.

○ 작업완료 보고서에 따라 실정산 처리(안전시설비 등)

○ 자재공급원(보도블럭) 승인 된 자재로 시공 할 것

○ 해당 노선 관할 경찰서와 교통 통제 사전협의로 시민불편 최소화

붙임  1. 작업지시서(2021-03차) 1부.

2. 내역서(2021-03차) 1부.   끝.