문서번호	토목부-9481
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		代이상근	05/18 김용제
협조

차선도색 및 표지판 수량 정산 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

2021. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

차선도색 및 표지판 수량 정산 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

차선 도색과 관련하여 공사중 교통처리 단계별 차선 도색 및 삭선의 수량이 누락되어져 있고, 교통규제표지판 설치에 대한 정산이 필요하여 검토 보고 드림.

**************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 세종수 제2021-209호(´21.05.17.) : 차선도색 및 표지판 수량 정산

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 삼성본관 ~ 세종대로사거리

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021. 5. 31.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 본 공사의 차선 도색은 당초 공사 완료분만 내역에 반영되어져 있고 공사중 구간별 보도 확장 및 클린로드 설치 공사시 단계별 교통처리계획에 따라 실시한 차선 도색 및 삭선 물량은 누락되어져 있어 내역 반영이 필요하며,

○ 또한 교통안전시설 심의시 변경된 교통규제표지판 정산과 이와 관련하여 별도로 시행한 교통설계비 및 감리비 정산을 실시하고자 함.

○ 단계별 공사중 차선 주요 검토 사항

- 1구역 1단계(시청교차로 ~ 삼성본관)

구 분

검 토 내 용

비 고

1단계

공사중

차선도색

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
차선도색(주/야간)	황색,백색,청색,연녹색,분홍색	m	-	372	372
차선도색(주/야간)	횡단보도,문자,기호,자전거마크	m	-	327	327
차로밑그림(주/야간)	도색, 15cm	m	-	699	699
차선제거(주/야간)	도색, 15cm	㎡	-	42	42

- 1구역 2단계(세종대로사거리 ~ 시청교차로)

구 분

검 토 내 용

비 고

2단계

공사중

차선도색

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
차선도색(주/야간)	황색,백색,청색,연녹색,분홍색	m	-	1,633	1,633
차선도색(주/야간)	횡단보도,문자,기호,자전거마크	m	-	1,894	1,894
차로밑그림(주/야간)	도색, 15cm	m	-	3,527	3,527
차선제거(주/야간)	도색, 15cm	㎡	-	560	560

- 1구역 3단계(세종대로사거리 ~ 대한문)

구 분

검 토 내 용

비 고

3단계

공사중

차선도색

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
차선도색(주/야간)	황색,백색,청색,연녹색,분홍색	m	-	5,410	5,410
차선도색(주/야간)	횡단보도,문자,기호,자전거마크	m	-	5,325	5,325
차로밑그림(주/야간)	도색, 15cm	m	-	10,735	10,735
차선제거(주/야간)	도색, 15cm	㎡	-	1,481	1,481

○ 수량 변경내용

품 명		규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
공사 중	차선도색(주/야간)	황색,백색,청색,연녹색, 분홍색	m	-	7,415	7,415
	차선도색(주/야간)	횡단보도,문자,기호, 자전거마크	m	-	7,546	7,546
	차로밑그림(주/야간)	도색, 15cm	m	-	14,961	14,961
	차선제거(주/야간)	도색, 15cm	㎡	-	2,083	2,083
공사 후	차선도색(주/야간)	황색,백색,청색,연녹색, 분홍색	m	5,977	5,338	-639
	차선도색(주/야간)	횡단보도,문자,기호, 자전거마크	m	10,983	7,492	-3,491
	차로밑그림(주/야간)	도색, 15cm	m	16,960	12,830	-2,130
	차선제거(주/야간)	도색, 15cm	㎡	21	-	-21
표지판	표지판 신설		개	14	27	13
	표지판 철거 및 이설		개	88	30	-58

○ 공사비 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
노면표시 및 교통안전표지
*****	**********	***********	***********
***	**********	***********	**********
************	*	***********	***********
****	***********	***********	***********
*****	**********	**********	**********
*****	***********	***********	***********
*****	*	*	*
****	***********	***********	***********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기와 같이 공사중 교통처리계획의 단계별 실시한 차선도색 및 삭선등 교통처리에 대한 비용 반영 및 관련 보고는 적정하므로 추후 설계변경자문회의에 상정하여 결과에 따라 설계변경을 시행 하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토 공문 1부  끝.