문서번호	토목부-9479
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		代이상근	05/18 김용제
협조

공사 수량 증·감에 따른 정산 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

2021. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사 수량 증·감에 따른 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

공사 추진중 조경플랜트 잔여 폭 판석 포장 및 아스팔트 포장 면적 증가 등 현장 여건 변동으로 인한 수량 정산이 필요하여 검토 보고 드림.

**************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 세종수 제2021-227호(´21.05.17.) : 공사 수량 증·감 정산

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 서울역교차로 ~ 시청교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021. 5. 31.

○ 도 급 비 : 6,154백만원

○ 시 공 사 : 키움건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 조경 식재 구간 판석 포장으로 변경 및 교차로 구간 아스팔트 포장 면적 추가와 공사기간 연장으로 인한 사무실, 중간적치장 임대기간 변경 등 현장 여건 변동으로 인한 수량 정산을 실시하고자 함.

○ 주요 수량 정산 내용

연번	항 목	내 용	적 요	비고
1	화강판석 포장	조경식재구간 판석 포장	①한화생명 앞 : 52㎡ ②북창동 앞 : 265㎡ ③흥국생명 앞 : 32㎡ ④KFC 앞 : -38㎡ ⑤서울역 3번출구 : 316㎡ 계 : 527㎡
2	아스팔트 포장	이면도로 접속부 및 교차로 구간 포장 연장	포장면적 : 1,590㎡
3	빗물받이 설치	지장물 저촉으로 기성품에서 현장 타설 빗물받이로 변경	빗물받이 92개소(기성품) ⇒ 빗물받이 76개소 (기성품 60개소,현장타설 16개소)
4	맨홀 인상, 인하	기존 보도블럭 교체구간(상공회의소~서울역 3번출구) 맨홀 인상, 인하 수량 정산	맨홀인상 58개소⇒35개소(감23) 맨홀인하 10개소⇒82개소(증72)
5	임대사무실	공사기간 연장으로 수량 정산	당초 9개월 ⇒10개월(1개월)

○ 공사량 증·감 현황

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
화강판석포장(주/야간)		㎡	6,693	7,220	527
절삭후 아스팔트 덧씌우기	T=10cm	㎡	40,655	42,245	1,590
우수받이 설치	300*900*900	개	92	60	-32
스틸그레이팅	400*1000*50	개	92	76	-16
연결관 설치	D=200mm	m	64	95	31
연결관 설치	D=300mm	m	530	303	-227
맨홀 인상	φ648~918	개소	58	35	-23
맨홀 인하	φ648~918	개소	10	82	72
현장사무소 및 창고임대외		개월	9	10	1
중간집하장 부지임대료	A=264㎡	식	1	1	-
조형앉음벽	450*H450,통석가공	m	9	-	-9	가로숲 실시 설계로 변경
가로수보호판A,B,C		조	248	-	-248

○ 공사비 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*****	*************	*************	***********
***	*************	*************	**********
****	*************	*************	***********
*****	***********	***********	**********
*****	*************	*************	***********
*****	*************	*************	************
****	*************	*************	***********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 아스팔트 포장시 교차로 및 이면도로 접속부의 노후된 부분까지 포장하는 것은 적정하며, 본 보고는 그간 현장 여건을 반영하여 시공한 사항으로 추후 설계변경자문회의에 상정하여 결과에 따라 설계변경을 시행 하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토 공문 1부  끝.