문서번호	물순환정책과-9209
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
하상준	이웅희	05/18 김재겸

『중구 다산동 빗물마을 조성사업』물순환 외부전문가 자문회의 개최계획

『중구 다산동 빗물마을 조성사업』

물순환 외부전문가 자문회의 개최계획

2021. 5.

물순환안전국

(물순환정책과)

『중구 다산동 빗물마을 조성사업』

물순환 외부전문가 자문회의 개최계획

마을 단위에서 물순환 회복을 위해 진행 중인 ’20~’21년 빗물마을 조성사업 중 「중구 다산동 빗물마을 조성사업」설계변경에 대하여 물순환 외부전문가의 자문을 추진하고자 함.

□ 추진경위

○ ’19.12.26. : ’20~’21년 빗물마을 조성사업 대상지 선정

○ ’20.02.~   : 빗물마을 기본 및 실시설계 용역 발주 및 추진

○ ’20.10.     : 중구 다산동 일대 빗물마을 설계완료

○ ’21.05.     : 중구 다산동 일대 빗물마을 설계변경 자문 요청

□ 추진현황

○ 종로구 빗물마을 조성사업 현황

구 분	중구(다산동 일대)
대상면적	23,200㎡
사업변경 내용	○ 투수블록 포장(1,484㎡ → 1,872㎡) ○ 생태주차장 설치(108㎡→97㎡) ○ 침투트렌치 설치(233m → 131m) ○ 벽면녹화(450㎡) → 옹벽녹화(90㎡) ○ 침투화단 조성(43㎡ → 36㎡) ○ 빗물저금통(14개 → 3개) ○ 침투통(정방형 400*500) 설치(0개 → 14개)
자문배경	○ 투수블록 설치 위치 변경 ○ 침투트렌치 설치위치 변경 ○ 벽면녹화 → 옹벽녹화로 변경 ※ 변경 세부내역 자문요청서 참고
추진기간	○ ’20.09. ~ ’21.05.(1차 공사 실시) ○ ’21.06. ~ ’21.12.(2차 공사 실시)

※ 최초 설계 자문 : ’20.6.24.~6.30. 외부전문가 자문

□ 자문회의 개요

○ 자문안건 : 빗물마을 조성사업 설계변경 적정성 여부 검토

○ 자문대상 : 1개소(중구 다산동 일대 빗물마을)

○ 자문방법 : 서면검토(※ 코로나19 대응에 따른 거리두기 고려)

○ 자문위원 : ***********************************************************

□ 향후계획

○ ’21. 5.20. : 자문회의 자료 전달(서울시 → 자문위원)

○ ’21. 5.27. : 자문결과 통보(서울시 → 자치구)

○ ’21. 6. ~ : 공사예정

□ 행정사항

○ 자문위원 자문수당 지급 : 400,000원

- 산출근거 : 100,000원/인 × 4인 = 400,000원

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 시민거버넌스 구축, 사무관리비

붙임 : 1. 자문요청서, 위치도, 도면 자료 각 1부.

2. 자문의견서 양식 1부. 끝.