투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(응봉공원 노후시설 정비공사 관급자재 구매)

1. 시설과-2188(2021.5.18.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인『응봉공원 노후시설 정비공사』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 응봉공원 노후시설 정비공사 관급자재 구매

나. 관급자재 현황 및 납품기한 변경

나라장터물 품식별번호	품 명	규 격	단 위	수 량	납품기한 (당초)	납품기한 (변경)	비 고
********	*********	********************	*	*****	*********	*********
********	*********	****************	*	*****	*********	*********

다. 연기사유 : 잦은 우천등으로 포장 품질 저하 및 하자 발생 최소화를 위해 납품기한 연기

라. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임   관급자재 연기 검토 보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	05/18 박종수
협조자
시행	시설과-2190	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)