문서번호	공원녹지정책과-7364
결재일자	2021. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공원협력팀장	공원녹지정책과장
조현		이윤창	05/18 이승복
협조

2021 민관협력 어린이놀이터 재조성 킥오프 회의 결과 보고

푸른도시국

(공원녹지정책과)

2021 민관협력 어린이놀이터 재조성 킥오프 회의 결과 보고

민관협력 어린이놀이터 재조성사업의 추진방향과 일정, 주민협의체 구성·운영 등의 논의를 위한 킥오프 회의를 개최하였기에 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 2021 민관협력 어린이놀이터 재조성 추진계획(공원녹지정책과-6111호, ’21.4.22.)

□ 회의개요

○ 일    시 : ’21. 5. 17.(월) 16:00~17:30

○ 장    소 : 푸른도시국 7층 미팅룸1

○ 참 석 자 : 총 10명(사업 담당자)

- ㈜코오롱 3명, 세이브더칠드런 3명, 서울시 2명, 은평구 2명

※ 회의시 코로나19 예방수칙인 손소독 실시와 마스크 착용 이행

○ 주요내용 : 본격적인 사업 착수를 위한 추진방향 및 세부사항 논의

□ 회의결과

<사업방향 및 추진일정 공유>

○ 서울시 창의어린이놀이터 재조성사업 가이드라인 반영한 설계·시공 추진

- 유니버셜디자인 등 서울시 창의어린이놀이터 재조성 가이드라인 설명

○ ’21.10. 준공, 개장을 목표로 한 설계·시공 추진계획(일정) 수립

- (5월)주민협의체 구성 ⇨ (6월~7월)주민의견 수렴 및 설계 ⇨ (7월~9월)공사

<주민협의체 구성·운영방안 논의>

○ 공원인근 거주 어린이 및 보육·교육기관장 등 지역대표, 주민 등으로 구성

- 어린이·성인 대상 디자인단 별도 구성 통해 의견수렴

- 유지관리 등 향후 놀이터의 주도그룹으로서 활용(놀세이버, 세이브더칠드런)

○ 코로나19 여건, 어린이 등 주 이용자를 대상으로 한 다양한 방식의 의견수렴

- 사업진행 단계에 따라 월 1~2회 이상 협의체 회의 개최

- 연령대별 눈높이, 코로나19 여건 등을 고려한 의견수렴 방식 도입

대 면	‣「사회적 거리 두기」고려, 소그룹 단위 설명회 개최 ‣연령대, 참여인원 등 고려, 기관별 “찾아가는” 설명회 및 설문 시행 ‣현수막 게첨, 놀이터 이용자 대상 아이디어 제시 및 홍보판넬 운영
비대면	‣네이버밴드 등 개설, 온라인 설명회 개최 ‣유선(구술), 기관별 이메일, 단체 채팅방 통한 니즈 파악 ‣구 공식 홈페이지 및 SNS 채널 활용 홍보·소통 채널 운영

<설계·시공 기관별 역할분담>

○ 후원 사업비는 놀이시설 및 환경 개선에 중점적으로 투입하고, 주변 노후시설 등 정비는 은평구 자체예산(추경 편성 중, 50백만원) 활용

- 세이브더칠드런·은평구 간 역할 분담(안)

세이브더칠드런	은 평 구
놀이시설 정비 (조합놀이대, 시소 등) 탄성포장재 교체 모래놀이공간 조성	노후시설 정비 (관리사무소 외벽, 점토블럭 포장 등) 기존 시설(운동·휴게시설 등) 이설 출입로 개선 및 안전시설 설치 등

※ 세부 설계안 및 예산여건 등에 따라 역할 분담안 조정

- 설계는 세이브더칠드런 선정 업체에서 일괄 시행하고, 공사는 기관별 시행

○ 개장식 등 행사는 공사 추진사항 및 코로나19 여건에 따라 별도 협의

□ 향후계획

○ 주민협의체 운영·운영, 주민설명회, 실시설계 : ’21. 5.~7.

○ 공사 시행                                  : ’21. 7.~9.

○ 개장                                       : ’21.10.

붙임 1. 회의자료 일건.

2. 회의사진 1부.  끝.