문서번호	물순환정책과-9319
결재일자	2021. 5. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장		물순환안전국장
최용석	이웅희	김재겸		05/20 최진석
협 조

『휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계』

용역 준공기한 연기 보고

2021. 5.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계」

용역 준공기한 연기 보고

「휘경유수지 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계 용역」관련 도시기반시설본부로부터 제출된 준공기한 연기 요청에 대한 검토보고 임.

※ 관련근거 : 도시기반시설본부 방재시설부-6488(2021. 5.18)

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’19. 4.15. ~ ’21. 5.31.

○ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링 종합건축사사무소 외 2개소

○ 용 역 비 : 1,188,720천원(장기계속, 2차 378,720천원)

○ 사업내용 : 합류식 하수관로 월류수(CSOs) 저류조 설치 설계

- 저류조 설치 기본 및 실시설계(저류조 설치 용량 : 35,000㎥)

Ⅱ		추진현황

○ ’18. 3. : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치계획 방침 수립(물순환안전국)

○ ’19. 4. : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본 및 실시설계 착수

○ ’19.12. : 휘경유수지 CSOs 저류조 설치 기본설계 완료(물순환정책과)

○ ’20. 1. : 실시설계 착수(도시기반시설본부)

○ ’20. 3. : 시공적합성 자문회의(도시기반시설본부)

○ ’20. 5. : 용역 일시중지(물순환정책과, 설계감리예산 미확보)

○ ’20.11. : 설계건설사업관리 용역 계약 및 실시설계용역 재착수

Ⅲ		준공기한 연기

**************************************

********************************************

**********

*******************************************************************************

○ 용역기간 변경

****	*****	*****	****
***	***********************	***********************	*******
***	***********************	***********************	*******

******************

******************

Ⅳ		조치계획

○ 준공기한 연기에 따른 계약변경 의뢰(재무과)

붙임 : 1. 준공기한 연기요청 공문(도시기반시설본부) 1부.

2. 합의각서(제일엔지니어링종합건축사사무소) 1부.  끝.