문서번호	토목부-9606
결재일자	2021. 5. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	05/21 김용제
협조

유관기관 요청사항 반영에 대한 정산 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

2021. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

유관기관 요청사항 반영에 대한 정산 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(2구역)]

공사 추진중 유관기관(부서) 요청사항에 대하여 조치하고 정산 검토 보고 드림.

******************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서울시설공단 주차시설운영처-7009호(2021.04.27.) : 주차검지센서 원인자 복구 요청

○ 중구청 교통행정과-35198호(2021.04.23.) : 공기주입기 이전 요청

○ 자전거정책과-4419호(2021.04.27.) : 자전거도로 노면표시 설치 협조요청

○ 세종수 제2021-244호(´21.05.20.) : 추가 공사 건 실정보고

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 서울역교차로 ~ 시청교차로

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021. 5. 31.

○ 도 급 비 : 6,154백만원

○ 시 공 사 : 키움건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 유관기관에서 공사 구간내에 설치되어 있는 주차검지센서 재설치 및 자전거 태양광 공기주입기 이설 요청과 자전거도로 비분리형 노면표시를 요청하여 공사를 시행하고 정산이 필요한 실정임.

○ 주요 수량 정산 내용

연번

항    목

내       용

적     요

비고

*

*************

**************************************************

*********

*****************

*

***************

**************************************************************************

*********

***************

*

***********************

********************************

**********

*****************

구분	사이즈(mm)
	600×1200	400×800
설치규격

○ 공사비 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*****		*********	**********
***		*******	********
****		*********	**********
*****		*******	********
*****		*********	**********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 공사시 발생한 시설물 복구는 타당함으로 상기와 같이 정산하여 추후 설계변경시 내역에 반영하고자 함.

붙임  1. 관련공문 각 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부  끝.