문서번호	물순환정책과-9548
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
최용석	代최용석	05/24 김재겸

『응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사』

주민설명회 결과보고

2021. 5.

물순환정책과

『응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사』

주민설명회 결과보고

『응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사』와 관련, 유수지 상부 복개 민원이 있어 도기본 주관 주민설명회를 참석하고 그 결과를 보고 드림

※ 도기본 방재시설부-6204(2021.5.13.) 【주민설명회 참석 요청】

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 응봉유수지 CSOs 저류조 설치공사

○ 위    치 : 성동구 고산자로 125-98(응봉유수지 내)

○ 규    모 : CSOs 저류조 4,000㎥

○ 공사기간 : ’20.11.16.~’21.5.17(18개월)

○ 공 사 비 : 6,786백만원(도급비 5,289, 건설사업관리 890, 관급비 607)

○ 시공/감리: ㈜대명이십일 외 1개사/(주)서영엔지니어링 외 2개사

○ 설 계 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜이산

Ⅱ		추 진 내 용

○ ’18. 2.12. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ ’19.12.12. : 기본 및 실시설계 완료

○ ’20.10.12. : 국고보조사업 설계 승인(한강유역환경청→물순환정책과)

○ ’20.11.12. : 공사계약

○ ’20.11.~’21.1. : 착공 전 인·허가 절차이행(철도보호지구 행위 및 위해·위험 안전관리계획서 승인 등)

○ ’21. 1.11. : 공사 착수단계 설계도서 검토사항 통보(도기본→설계사)

○ ’21. 4. ~  : 실시설계 보완을 위한 공사 중지(설계 오류·누락 사항)

○ ’21. 5.21. : 주민설명회 개최(응봉동 주민센터)

Ⅲ		주민설명회 결과

○ 일    시 : ’21. 5.21.(금) 15:00 ~ 15:50

○ 장    소 : 응봉동 주민센터 3층 다목적실

○ 참 석 자 : 총 12명

- ****************************************************************

- *************************************************

○ 설명회 내용(방재시설부 김광호)

- 공사 목적 및 개요 설명

- 소음·진동 등 주민 생활불편사항 저감 대책

- 공사중 인근 응봉초교 학생 학습권 보호를 위한 협의

○ 주민의견

*****************************************

- **************************************************************

- *********************************************

○ 답변사항

【**************】

- ***********************************

- **************************************************

- *********************************************************************

【**********************】

- **************************************************

【주민설명회 사진】

*

※ 유수지 복개관련 절차

- 유수지 복개 결정 및 상부 공간 활용계획에 따라 공사범위(구조 검토 등) 결정 가능

- 관련규정 : 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙

① 유수시설에 건축물을 수반하지 아니한 경우로써, 도로·광장·주차장·체육시설·자동차운전연습장 및 녹지의 용도로만 사용

② 유수시설에 건축물을 수반하는 경우로써, 공공청사·대학생용 공공기숙사·문화시설·사회복지시설·체육시설·평생학습관·임대를 목적으로 하는 공공주택

- 도시계획시설 결정 절차

Ⅲ		향 후 계 획

○ *****************************

○ ***********************************

붙임  주민설명회 참삭자 명단(주민대표) 1부.  끝.