문서번호	토목부-9761
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	터널건설과장	토목부장		시설국장
이상근	최진우	김용제		05/24 代구본상
협 조

『세종대로 도로공간 재편사업』

준공기한 연장에 대한 검토보고

2021. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『세종대로 도로공간 재편사업』

준공기한 연장에 대한 검토보고

「세종대로 도로공간 재편사업」과 관련하여 감리단으로부터 제출된 준공기한 연기요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관련문서

❍ 보행정책과-2988호(2021. 3. 5.) : 교통안전시설 변경심의 상정 의뢰

❍ 세종수 제2021-251호(2021. 5. 24.) : 시설공사 준공기간 연기 요청건에 대한 검토보고(세종대로 1,2구역)

Ⅱ		공사개요

❍ 사업규모 : 총연장 1.545km

- 토목 : 차로축소 2~3개차로, 보도확장 및 자전거도로 설치 등

- 조경 : 가로 숲 조성(수목식재, 식재공간조성), 시설물 설치 등

❍ 공사기간 : 2020.07.16.~2021. 5.31.

❍ 도 급 비 : 12,576백만원(1구역 6,422백만원, 2구역 6,154백만원)

❍ 시 공 사 : 1구역 국정종합건설(주)외 2개사, 2구역 키움건설(주)외 2개사

❍ 감 리 사 : 수성엔지니어링 외 2개사

❍ 사업 위치도

1구역 공사구간

2구역 공사구간

Ⅲ		사업 추진경위

❍ '17. 11 : 도로공간 재편 계획수립(보행정책과)

❍ '20. 03 : 디자인심의 완료

❍ '20. 04 : 교통안전시설 심의 완료

❍ '20. 07 : 공사 발주 및 착공

❍ '20. 12 : 임시 개통(보도확장 및 자전거도로 설치)

❍ '21. 03 : 클린로드 및 환기구 이설, 아스팔트 절삭 후 덧씌우기 완료, 조경공사(교목 683주, 관목 22,753주, 초화류 208,020주)

❍ '20. 04 : 교통안전시설 변경심의 상정

- 자전거도로 개선(전용도로⇒겸용도로)

- 노면표시 및 교통안전표지 개선

- 교통신호기 이설 등

Ⅳ		보고내용

❍ 준공기한 연장 사유 및 일수

- 세종대로 도로공간 재편사업 추진 중 교통안전시설 변경에 대하여 서울지방경찰청에 변경심의를 요청하였으나 현재 검토 중으로 회신결과가 '20. 5. 26. 예정으로 이에 따른 보완시공이 예상되어 '21. 6. 30까지 공사기간 연장이 필요함.

구분	구역	당 초	변 경	비 고
공사 기간	1구역	2020.07.16. ~ 2021.05.31 (320일)	2020.07.16. ~ 2021.06.30 (350일)	증 30일
	2구역	2020.07.16. ~ 2021.05.31 (320일)	2020.07.16. ~ 2021.06.30 (350일)	증 30일

Ⅴ		조치계획

❍ 현재 자전거도로 운영 방식 변경(전용도로⇒겸용도로)과 그간 변경된 교통안전시설에 대하여 서울지방경찰청에서 심의중으로 결과에 따른 보완시공이 예상되어 공사기간 연장은 타당하다고 판단되는바, '21. 06. 30.까지 공사기한을 연기하여 사업시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 보행정책과 공문 1부.

2. 건설사업관리단 검토 공문 1부.  끝.