투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	예비준공검사 및 개통대비 합동점검 시행[청계천로 자전거 전용도로 설치공사]

1. 관련근거

가. “건설공사 예비준공검사 시행 방법 개선” 기술심사담당관-10083(2018. 6. 28.)

나. “도로 등 시설물 유지관리사무 개선 방안” 도로계획과-17186(2019. 12. 13.)

다. “청계천로 자전거 전용도로 예비준공검사 및 개통대비 합동점검 시행” 토목부-9623(2021. 5.21.)

2. 우리시(본부)에서 시행중인 「청계천로 자전거 전용도로 설치공사」에 대하여 아래와 같이 예비준공검사 및 개통대비 합동점검을 시행코자 하오니 참석하여 주시길 바랍니다. (예비준공검사에 참석이 어려울 경우 건설사업관리단과 협의하여 별도 점검후 붙임 양식으로 2021. 5. 31.까지 토목부로 점검결과 제출)

*******************************************************

□ 예비준공검사 및 합동점검 개요

○ 일시 : 2021.  5. 27.(목) 10:00 ~ 17:00

○ 장소

- 청계광장(10:00) : 하천관리과(서울시설공단), 북부도로사업소, 서부도로사업소, 종로구, 중구,

- 고산자교(15:00) : 하천관리과(서울시설공단), 성동도로사업소, 성동구, 동대문구,

○ 검사 및 입회자 : 발주처, 유관기관, 기술지원기술인, 책임건설사업관리기술인 등

- 검사자 : 공사관리관(토목부, 방재시설부, 설비부)

- 입회자

· 시설물 관리기관 : 하천관리과(서울시설공단), 북부·서부·성동도로사업소(시설보수과,         기전과), 종로구·중구·성동구·동대문구(도로과, 치수과, 공원녹지과 등)

· 기술지원기술인

· 책임건설사업관리기술인 및 현장대리인

○ 내용 : 시설물 관리부서 확정 및 의견 반영, 설계도면 및 공사시방서에 따른 적정 시공여부 확인 등

□ 개통대비 사전점검

○ 일  시 : 2021.  5. 26.(수) 14:00 ~

○ 장  소 : 청계광장

○ 점검자 : 도기본(토목부, 방재시설부, 설비부), 자전거정책과, 건설사업관리단 및 시공사

□ 향후계획

○ 시설물관리기관 확정(자전거정책과) 및 예비준공검사 지적사항 제출(토목부, 별첨양식) : 2021. 5. 31.까지

○ 예비준공검사 지적사항 조치 완료 : 2021. 6.15.까지

※ 기한내 조치가 어려운 경우 시설물관리기관과 별도협의

○ 공사준공 및 시설물 관리위임 : 2021. 6. 30.

○ 시설물 인수·인계 준공도서 제출 : 2021. 7.15.까지

붙임  1. 예비준공검사 방침서 1부.

2. 시설물 관리기관 1부.

3. 예비준공검사 지적사항 결과보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(자전거정책과장),서 울 특 별 시 장(하천관리과장),설비부장,방재시설부장,서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(기전과장),서울특별시 성동도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(기전과장),동부공원녹지사업소장,중부공원녹지사업소장,서울식물원장,서울시설공단이사장,종로구청장(도로과),서울특별시중구청장(도로시설과장),동대문구청장(도로과장),성동구청장(공원녹지과장),성동구청장(토목과장)
주무관	남만조		도시고속도로과장	장수철		토목부장	05/24 김용제
협조자
시행	토목부-9755	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)