투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인(탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비 공사))

1.업무지시현장 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사

선진엔지니어링종합건축사사무소, 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설

기계설비공사(장기-1차) 주식회사 유신

2.작 성 일 자 : 2021-05-25 13:05:57

3.지 시 내 용 : 탄천하감 2021-95(2021. 5. 24.)호 관련입니다. 위 호와 관련 『탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』 실정보고에 대하여 검토한 결과 건설사업관리기술자의 의견이 적정하여 아래와 같이 승인합니다.

가. 승인내용

- 1·2 처리장 옥외 농측슬러지 이송배관 보온

- 1·2 처리장 이동통로 계단 설치

- 1 처리장 응집조 교반기 방음커버 추가 설치.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							나경운			열빛총괄과장					05/25 여인웅
협조자
시행			설비부-7134									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	대시민공개