문서번호	한양도성도감-4927
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
최지애		윤용훈	05/25 안중호
협조

2021년 한양도성 성돌 보존처리 공사 계획

2021. 5.

문 화 본 부

(한양도성도감)

2021년 한양도성 성돌 보존처리 공사 계획

한양도성 성돌(풍화성돌, 각자성석, 오염성돌) 상태에 따라 적절한 방법으로 보존처리하여 성돌의 추가 손상을 예방하고, 본래의 형태를 유지·관리하고자 함

Ⅰ		추진 경위

○	`17.03.~`17.11.	:	한양도성 낙산구간 풍화성돌 보존처리(23개소)
	4가지 보존처리 공법 사용(인조석 수지, 합성수지, 화강암 타일, 3D출력물)
○	`18.06.~`18.10.	:	낙산 및 목멱산구간 각자성석 보존처리공사(60개소)
○	`19.06.~`19.11.	:	2019년 한양도성 낙산구간 성돌 보존처리(110개소)
○	`20.05.~`20.11.	:	2020년 한양도성 남산구간 성돌 보존처리(96개소)
○	`20.10.~`20.12.	:	2021년 한양도성 풍화성돌 보존처리 실시설계(115개소)
○	`21.03.~`21.05.	:	한양도성 각자성석 및 오염성돌 보존처리 설계(80개소)

Ⅱ		추진 배경

○ 한양도성 성돌은 다양한 요인(온·습도 변화, 성벽 하중, 대기오염 등)으로 분해되어

손상되고 있으며, 페인트 낙서, 철녹 등의 오염물이 성벽 미관을 해치고 있는 상태임

○ 매년 조치가 시급한 성돌을 우선 선별하여 보존처리를 실시하고 있음

○ 2021년 한양도성 성돌 보존처리 공사를 수행하기 위해 실시설계를 완료함

(설계기간 ; 2020년 10월~2021년 5월)

Ⅲ		공사 시행계획

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2021년 한양도성 성돌 보존처리 공사

○ 사업대상 : 한양도성 성돌(풍화성돌 115개소, 각자성석60개소, 낙서정비 20개소)

****************************

**********************************

□ 세부 공사내용

① 풍화성돌 보존처리(균열부 메움 및 강화처리)

- 강화처리 : 부스러지는 성돌 표면에 경화제(OH-100, KSE300 약품) 2회 도포

- 균열부분 메움처리 : 석재 보존처리용 에폭시 수지와 무기질 재료(석분 등)를 혼합하여

균열부 메움처리, 수지처리 부분 질감표현 및 색맞춤

② 각자성석 보존처리(풍화 상태조사 및 표면 강화처리)

- 풍화 상태조사 : 비파괴분석(초음파분석 등)을 활용하여 각자성석 풍화도 조사

- 강화처리 : 부스러지는 성돌 표면에 경화제(OH-100, KSE300 약품) 2회 도포

- 모니터링 : 비색계를 활용하여 각자성석 표면 색상변화 모니터링

③ 오염성돌 보존처리(페인트 낙서 정비, 철녹 시범 제거)

- 페인트 낙서 제거 : 화학약품 및 기계세정 방법을 활용하여 낙서 정비

- 철녹 제거 : 녹물로 오염된 성벽 표면을 화학약품, 기계세정, 레이저 등 다양한

방법을 적용하여 시범 보존처리 실시

풍화성돌 균열부분	각자성석 풍화도 분석 (붉은색 : 손상부분)	페인트 낙서

Ⅳ		계약방법 및 향후계획

□ 계약방법 및 소요예산

*************************

**************************************************

**********************************************

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 2항/시행령 제20조 1항 6호/

시행규칙 제 25조 3항

****************************************

- 한양도성 보존관리활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화, 학술조사 및 연구, 시설비

□ 향후계획

○	`21.06.	:	한양도성 성돌 보존처리 및 문화재 비상주감리 계약
○	`21.07.	:	보존처리 전문가 1차 자문회의
	풍화성돌 균열부 처리 확인, 철녹 오염물 제거 테스트
○	`21.09.	:	보존처리 전문가 2차 자문회의
	성돌 보존처리 중간점검 및 현장 기술지도 실시
○	`21.12.	:	성돌 보존처리 완료 및 보고서 작성

붙  임 : 보존처리 시방서 1부

보존처리 설계 내역서 1부.  끝.