문서번호	설비부-7200
결재일자	2021. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정인석		오삼록	05/26 김호성
협조

『시립청소년음악창작센터 건립 기계설비공사』

지열시스템 설계변경(정산) 검토보고

2021. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년음악창작센터 건립 기계설비공사』

지열시스템 설계변경(정산) 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년음악창작센터 건립 기계설비공사』 지열시스템의 1차 계약분 준공 전 설계변경(정산) 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		계약현황

○ 건    명 : 시립청소년음악창작센터 건립 지열시스템 제작설치

****************************************

******************************************

**************************************

************************

Ⅱ		관련근거

○ 지열시스템 제작설치 설계변경(정산)에 대한 변경 계약 요청

(시립CM 제2021-144호, '21.05.25.)

Ⅲ		검토내용

○ 변경사유 : 1차 계약분 건강보험료 등 제경비 정산

○ 변경내용                                                 (단위: 원)

차수	계약금액			비고
	변경 전	변경 후	증․감
***	***********	***********	**********	***********
***	***********	***********	**********	**********************

○ 납품기한 : 변경없음

○ 변경세부내역

- 1차 계약분 정산세부내역                                   (단위: 원)

구분	변경 전	변경 후	증․감	비고
재료비	***********	***********	*
노무비	**********	**********	*
경비	**********	**********	*
고용보험료	*******	*******	*
산재보험료	*********	*********	*
건강보험료	*********	*********	**********
연금보험료	*********	*********	**********
노인장기요양보험료	*******	*******	********
산업안전보건관리비	*********	*********	**********
환경보전비	*******	*	********
소계	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	********
합계	***********	***********	**********	단위절사

- 총차 계약분 변경세부내역                                    (단위: 원)

구분	변경 전	변경 후	증․감	비고
재료비	***********	***********	*
노무비	***********	***********	*
경비	**********	**********	*
고용보험료	*******	*******	*
산재보험료	*********	*********	*
건강보험료	*********	*********	**********
연금보험료	*********	*********	**********
노인장기요양보험료	*******	*******	********
산업안전보건관리비	*********	*********	**********
환경보전비	*******	*******	********
소계	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	********
합계	***********	***********	**********	단위절사

○ 건설사업관리기술인 검토의견

- 계약상대자가 제출한「시립청소년음악창작센터 건립 지열시스템 제작설치」에 대한 계약금액 변경요청 제출 건과 관련하여 건강보험료 등의 간접비 미사용분에 대한 사항을 검토한 결과 설계변경(정산)내역이 적정하다고 판단됨

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 지열시스템 구매건(총차 및 1차 계약분)에 대하여 계약부서(총무부)에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.