문서번호	공원시설과-3218
결재일자	2021. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
이병철		양돈욱	05/26 김상국
협조

『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』

설계변경(최종) 계획 보고

2021. 5.

한강사업본부

(공원시설과)

『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』

설계변경(최종) 계획 보고

우리 본부에서 시행중인 『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』에 대하여 물량 증․감 및 신규공정을 반영한 설계변경을 시행하고자 함.

※ 서울시설공단 공사감독1처-3696(2021. 5. 25.) 호와 관련임

공사개요

○ 공 사 명 : 광나루 잠원수영장 노후상수관로 교체공사

○ 위    치 : 광나루, 잠원 수영장

○ 공사기간 : (총차) 2020. 7.6. ~ 2021. 5.30.

(2 차) 2021. 2.18. ~ 2020. 5.30.

○ 총공사비 : *******************

*******************************************************

******************

***************************************************

설계변경 내용

○ 계약금액 변경(총차)

구 분	당 초	변 경	증감
총 공 사 비	*************	*************	*****************
도 급 비	*************	*************	*****************
관 급 비	***********	***********	*****************
이 전 비	***********	***********	*****************

○ 계약금액 변경(2차)

구 분	당 초	변 경	증감
총 공 사 비	***********	***********	****************
도 급 비	***********	***********	*****************
관 급 비	**********	**********	*****************
이 전 비	***********	-	*****************

○ 주요 변경내용

- 현장 실정보고에 의한 신규공종  및 물량변경

․ 사철나무식재, 경계석설치, 데크설치, 맨홀철판 덮개, 보도블록 등

- 2차 공사 4대보험, 안전관리비등 제경비 정산 반영 등

구분	공종	규격	단위	수 량		증 감	비고
				변경전	변경후
광나루	보도블록포장	t8	㎡	5,737	3,313	감 2,424
	도로경계석설치	150×150×1,000,직선	m	136	230	증 94
	사철나무식재	h=1.2 ~1.5	주	-	600	증 600
잠 원	목재데크 설치		㎡	300	-	감 300
	목재데크 자재	w90×21t	㎡	-	170	증 170
	목재데크 설치	w90×21t	㎡	-	155	증 155
	목재데크틀설치		㎡	-	155	증 155
	오일스텐 칠	2회	㎡	-	310	증 310

조치의견

○ 위와 같이 현장여건 변동에 의한 물량 증․감 및 신규공정을 반영한 설계변경을 시행하여 공사에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증 1부.

3. 설계변경관련 보고서 1부.  끝.