문서번호	기전과-5374
결재일자	2021. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김헌경		05/26 배수웅
협조
	주무관		이지영

『2021년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

실정보고 검토보고(1차 작업지시)

2021. 5.

동부도로사업소

( 기  전  과 )

『2021년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

실정보고 검토보고(1차 작업지시)

2021년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)와 관련   감리업체로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고드림

1		관련근거

□ 2021년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 1차 작업지시

○ 기전과-3560(21.04.06)

□ 2021년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 1차 실정보고서류 제출

○ 협우지여엔지니어링 서교감 제21-34호(21.05.24)

2		사업개요

□ 공 사 명 : 2021년 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

□ 공사개요 : 강남구 외 3개구 교통신호기 설치

(차량등, 보행등, 잔여시간표시기, 음향신호기 등)

□ 계약기간 : **********************

□ 계 약 자 : **************

□ 계약금액 : *************

□ 감리업체 : ***************

3		1차 작업지시 내용

□ 작업내용 : 교통신호제어기 및 신호지주 신설 등

□ 작업장소 : 송파구 아이코리아 후문 외 3개소

□ 공사금액 : **********

□ 작업기간 : 2021. 4. 7.(수) ~ 5. 28.(금)

4		실정보고 내용

□ 주요 검토내용

교차로명	현황 및 문제점	감리 의견	검토 결과	비고 (단위: 원)
아이코리아 후문삼거리	① 기존 제어기 좌대가 지주형 좌대로 재사용 가능 ② 기존 차량신호등(1면3색) 이설 불필요 ③ 보행철주 기초앙카 재사용 가능 ④ 토목공사 작업에 따른 굴착 공정 변경 필요 ⑤ 가로등 개별 설치 진행으로 통합형 철주 설치 불가	① 제어기 좌대 교체 물량 제외 (제어기) ② 차량신호등(1면3색) 물량 제외 (P4) ③ 보행철주 기초앙카 물량 제외 (P1) ④ 굴착 공정 변경 (나팔구, 소형고압블럭 → 사이도굴착) (H5→P2, H4→P3) ⑤ 통합형철주 설치 물량 제외 (P2)	적정	▼감 3,499,216원
역삼금호 어울림	① 소음민원 발생으로 야간 굴착불가 주간 굴착으로 변경 필요 ② 역삼금호어울림 아파트 민원으로 횡단 보도 및 맨홀 위치 변경필요 ③ 하부 지장물로 굴착 심도 물량 변경 필요	① 야간굴착→주간굴착으로 변경 (H3→H4, H6→H5) ② 횡단보도 (출입구→1m) 및 맨홀 위치 변경 (아스팔트 굴착배관 3m 물량 증감 발생 ③ 아스팔트 횡단굴착 물량 변경 (H6→H5) (B=1.2M → B=0.8M)	적정	▼감 5,429,893원
행복숲 어린이집앞	① 지주부착형 제어기 관급 불가 ② 음향신호기 본체 관급 불가 ③ 송파경찰서 및 교통신호운영실 D/B에 따른 보행자 작동신호기 설치 필요	①지주부착형 제어기 관급→사급으로 변경 ②음향신호기 관급→사급으로 변경 ③보행자 작동신호기 물량 반영	적정	▲증 10,144,572원
풍납제1 경로당앞	①토목공사 지연으로 공사 진행 불가	①토목공사 6월 중순부터 작업예정으로 진행 사항에 맞추어 병행하여 작업진행 (금번 작업지시 전체 물량 제외)	적정	▼감 16,039,055원

5		보고자 의견

□ 감리업체로부터 접수된 1차 실정보고서에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적당한 것으로 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임  실정보고서 1부.  끝.