투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(수출의다리고가보수공사 실시설계용역)

우리사업소에서 시행중에 있는「수출의다리고가보수공사 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 수출의다리고가보수공사 실시설계용역

나. 용역기간 : 2021. 2. 26. ~ 2021. 5. 30

다. 용 역 비 : ***********

라. 도 급 자 : ***************************

마. 준공기간 변경내용

- 당 초 : 2021. 2. 26. ~ 2021. 5. 30.

- 변 경 : 2021. 2. 26. ~ 2021. 8. 30.

바. 준공기간 연기 사유 : 승강기 설치 위치가 사유지 및 도로점용구간에 위치하고 있어 소유자와 사용자 협의 및 도시계획변경신청시 관련기관 협의 소요기간(주민의견 수렴기간 포함)이 필요함.

사. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 고가차도및입체교차로관리, 수출의다리고가보수공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 준공기한 연기의뢰 서류 각 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	고흥일		시설보수과장	05/21 김준섭
협조자
시행	시설보수과-3800	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 남부도로사업소	/
전화	3284-5465	/전송	836-3094	/		/	부분공개(5)