		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(1차1회)에 따른 변경 계약의뢰(잠실수중보 보수보강공사 감독권한대행 건설사업관리용역-1차)

우리 본부에서 추진중인 「잠실수중보 보수보강공사 감독권한대행 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차1회)을 시행하고 계약의뢰 합니다.

1. 용 역 명 : 잠실수중보 보수보강공사 감독권한대행 건설사업관리용역

2. 계약기간 : 총차 2021.2.8.~2022.8.8.(1차 2021.2.8.~2021.9.30.)

3. 계약금액 : 총차 648,110,000원(1차 150,000,000원)

4. 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링 외 1개사 대표 김종흔

5. 변경금액

(단위:원)

구 분		총 차(변경없음)			1차(1회)
		당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
총용역비		648,110,000	648,110,000	-	150,000,000	276,980,000	증) 126,980,000
도급비	공급가액	589,190,909	589,190,909	-	136,363,636	251,800,000	증) 115,436,364
	부가가치세	58,919,091	58,919,091	-	13,636,364	25,180,000	증) 11,543,636
	소 계	648,110,000	648,110,000	-	150,000,000	276,980,000	증) 126,980,000

6. 변경사유 : 1차분 건설사업관리기술인 및 현장사무원 투입계획 변경

7. 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비, 국가하천 유지보수, 시설비및부대비, 감리비(예산편성부서 : 물순환안전국 하천관리과)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부

2. 변경 설계서(1차1회) 1부

3. 변경합의서 1부.  끝.

							치수과장
주무관							박지수			치수과장					05/25 최연호
협조자
시행			치수과-3371									(						)		접수											(						)
우	04770					서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)															/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)