문서번호	자전거정책과-5390
결재일자	2021. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자전거도로사업팀장	자전거정책과장
서주희	박상위	05/25 배덕환

서울형 자전거 방향표지 제작·설치 용역 계약변경 계획

2021.5.

도시교통실

(자전거정책과)

서울형 자전거 방향표지 제작·설치 용역 계약변경 계획

「서울형 자전거 방향표지 제작·설치 용역」과 관련, 과업내용 추가에 따라 원활한 제작·설치를 위해 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울형 자전거 방향표지 제작·설치 용역

○ 용역기간 : 2021.4.2. ~ 2021.5.31.(2개월)

○ 계약금액 : 금20,580,000원(금이천오십팔만원)

○ 용역업체 :*****************

○ 추진방식 : 수의계약

○ 과업 주요내용

- 이용자 중심 거리, 시간 및 랜드마크 표기 등 자전거방향표지 디자인 개선 및 시범 설치

□ 계약변경 내용

○ 변경사항

※ 예산과목 : 자전거 이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리(교통관리계정), 자전거 도로 안전시설 확충, 사무관리비(201-01)

구 분	당 초	변 경	증 감
용역기간	’21.4.2.~’21.5.31.	******************	******
용역금액	20,580천원	********	*******

○ 변경사유 : 표지판 디자인 시민의견 수렴, 캠페이성(상징) 디자인 추가 요청

□ 향후 계획

○ ’21.6월 초	: 표지판 디자인 시민의견 수렴

○ ’21.6월 중	: 캠페이성(상징) 디자인 초안 검토

○ ’21.7월~	: 市 자전거 설치 및 유지관리 매뉴얼 반영