문서번호	토목부-9980
결재일자	2021. 5. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김현중	김동현	05/26 김용제

성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기 검토 보고

2021. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

-성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계 용역-

준공기한 연기 검토 보고

하천점용허가 사전협의 및 자문회의 후속조치 추가 검토 및 의견수렴 과정이 소요되어 설계일정 지연에 따른 설계사의 준공기간 연기 요청에 대한 검토 보고 드림.

□ 관련규정

○ 건설기술진흥법 시행령 제71조(기본설계)

○ 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 제36조(제출서류의 검토 및 보고)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 성동교 확장 및 진입램프 신설 기본 및 실시설계용역(총괄, 1차분)

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 성동교 일대

○ 용역규모 : 성동교 확장(1차로, L=186m, B=6.9m), 진입연결교량(1차로, L=60m, B=6.9m), 토공구간(L=74m, B=6.9m)

○ 계약기간 : 2020. 8. 5. ~ 2021. 8. 4

○ 계약금액 : ************************

○ 설 계 사 : ㈜수성엔지니어링, ㈜진우엔지니어링코리아, 디앤에스이앤씨㈜

□ 추진경과

○ ’20. 8. 5.           : 기본설계(1차) 착수

○ ’20. 8. ~ ’20. 9.   : 관계기관협의

○ ’20. 9. ~ ’20. 12.  : 하천점용허가 사전협의(서울지방국토관리청 하천계획과)

○ ’21. 1. 28.          : 용역 준공기한 연기(1차분)

○ ’21. 3. 9.           : 자문회의 개최

□ 검토사항

○ 연장기한

당초 계약기간		변경 계약기간		증/감
총괄	’20. 8. 5. ~ ’21. 8. 4.	총괄	’20. 8. 5. ~ ’21. 11. 30.	증) 118일
1차	’20. 8. 5. ∼ ’21. 5. 31.	1차	’20. 8. 5. ∼ ’21. 7. 30.	증) 60일

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 : 미부과

○ 연기 사유

- *******************************************************************************************************************************************

□ 검토결과

○ *******************************************************************************************

○ 향후 최적의 설계품질을 확보하기 위해서는 충분한 설계 기간을 부여해야하므로 준공기한을 연기하고자 함.

□ 향후계획

○ ’21. 6.  : 기본설계 VE

○ ’21. 7.  : 기본설계 기술심의

○ ’21. 11. : 기본 및 실시설계 준공

붙임  준공기한 연기 요청 공문(수성엔지니어링)1부.  끝.