문서번호	도시철도사업부-4807
결재일자	2021. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신림선과장	도시철도사업부장
이나영		권영민	05/27 이철
협 조

『신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)』

휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 검토 보고(´21년 6월)

2021. 5.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

『신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)』

휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 검토 보고(´21.6월)

신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구) 관련 ´21년 6월 휴일 및 연장 감리 근무계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

□ 휴일 및 연장 근무 승인 요청내용

□ 관련 근거 : 신림신성-2021-226호(´21.5.26.)

□ 휴일 근무 : 총 6일

- 6.5(토)/6.12(토)/6.13(일)/6.19(토)/6.26(토)/6.27(일)

□ 연장 근무 : ‘21.6.1. ~ 6.30.

□ 휴일 및 연장 근무 계획

□ 관련근거

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제3장 제5절 4.0 (휴일 및 야간작업)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.2 (휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.3 (휴일 및 야간작업 근무 요령)

□ 휴일 및 연장 근무 사유

- 장비, 기능공의 적정 운영 및 연속적인 작업시행을 통해 정거장, 터널 구조물 공정을 신속하게 추진하여 공정 만회

- 유동인구 최소 시간을 고려 연속작업으로 신속히 추진하므로서 교통소통 조기 정상화 및 시민불편 해소에 만전

□ 적정성 및 비용 부담

【휴일 근무】

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ´13.11.14.)

□휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇨ 시공사 귀책은 시공사에서 대가 지급

- 건설사업관리기술단 검토 의견

□휴일작업 사유 : ‘시공사 귀책으로 인한 휴일근무’임을 명기(시공사)

【연장·야간 근무】

- 연장·야간근무는 주․야간으로 산출된 공사비에 의거 감리대가를 산출하였으므로 추가지급 제외 (입찰안내서 제6장 6.2.1)

- 용역계약일반조건 Ⅴ.4.나항목 단서조항에 의한 작업일 경우 감리원은 대체휴무하고 근로기준법에서 정한 1.5배의 기준은 적용하지 않는다.

□용역계약일반조건 Ⅴ.4.나 : 계약상대자는 발주기관과 협의하여 야간작업을 하는 경우 추가비용을 청구할 수 없다.

□ 개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정

□ 휴일 및 연장 근무 주요내용

【휴일 근무】

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		근무자
6.05(토)	주간 (건설사업관리기술자1인)	109정거장	· 상부 되메우기 및 지장물 복구공 등	***
		#4작업구	· 중앙 대피통로 시설물 설치 등
		110정거장	· 환기구 덕트 철근 조립 및 거푸집 설치 · 상부 되메우기 및 지장물 복구공 등
		110E환기구	· 하수관로 부설 작업 등
		111정거장	· 외부 출입구 철근 및 거푸집 설치 · 환기구 덕트 거푸집 해체, 되메우기 작업 등
6.12(토)	주간 (건설사업관리기술자1인)	109정거장	· 환기구 덕트 철근 조립 및 거푸집 설치 · 상부 되메우기 및 지장물 복구공 등	***
		#4작업구	· 중앙 대피통로 시설물 설치 · 횡갱 연결부 라이닝 철근 및 거푸집 설치 등
		110정거장	· 정화조 덕트 철근 조립 및 거푸집 설치 · 주형보 및 복공판 해체. 지장물 복구공 등
		110E환기구	· 되메우기 작업 및 빗물받이 연결관 설치 등
		111정거장	· 외부 출입구 철근 및 거푸집 설치 · 환기구 덕트 철근조립, 가시설 해체 등
6.13(일)	주간 (건설사업관리기술자1인)	109정거장	· 환기구 덕트 철근 조립 및 거푸집 설치 · 지장물 복구공 등	***
		#4작업구	· 중앙 대피통로 시설물 설치 · 횡갱 연결부 철근조립 및 거푸집 설치 등
		110E환기구	· 되메우기 작업 및 빗물받이 연결관 설치 등
		111정거장	· 외부 출입구 철근 조립 및 거푸집 설치 · 환기구 덕트 철근조립, 가시설 해체 등

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		근무자
6.19(토)	주간 (건설사업관리기술자1인)	109정거장	· 상부 되메우기 및 지장물 복구공 등	***
		#4작업구	· 중앙 대피통로 시설물 설치 · 횡갱 연결부 라이닝 철근 및 거푸집 설치 등
		110정거장	· 주형보 및 복공판 해체. 지장물 복구공 · 상부 되메우기 및 골재 포설 다짐 작업 등
		110E환기구	· 주형보 및 복공 해체 작업 등
		111정거장	· 외부 출입구 거푸집 설치, 되메우기 작업 · 집수정 및 정화조 덕트 동바리 설치 등
6.26(토)	주간 (건설사업관리기술자1인)	109정거장	· 상부 되메우기 및 지장물 복구공 등	***
		#4작업구	· 중앙 대피통로 시설물 설치 · 횡갱 접속부 뒤채움 거푸집 설치 등
		110정거장	· 주형보 및 복공판 해체 작업 · 상부 되메우기 및 골재 포설 다짐 작업 등
		110E환기구	· 상부 되메우기 작업 등
		111정거장	· 외부 출입구 거푸집 해체, 되메우기 작업 · 집수정 및 정화조 덕트 동바리 설치 등
6.27(일)	주간 (건설사업관리기술자1인)	109정거장	· 상부 되메우기 작업, 지장물 복구공 등	***
		#4작업구	· 중앙 대피통로 시설물 설치 · 횡갱 접속부 뒤채움 거푸집 설치 등
		110E환기구	· 상부 되메우기 작업 등
		111정거장	· 주형보 및 복공판 해체, 되메우기 작업 · 집수정 및 정화조 덕트 거푸집 설치 등
		111정거장	· 외부 출입구 철근 및 거푸집 설치 · 상부 되메우기 및 지장물 복구공 등

【연장 근무】

근무일자	근무자	근무형태	시공사 연장작업 주요내용
6월1주차 (6.01 ~ 6.05)	주52시간 준수 범위내 연장 근무 및 다음날 주간 유연근무 시행	연장 (건설사업관리 기술자1인)	109정거장 110정거장 111정거장	·철근 조립 ·거푸집 설치 ·동바리설치 및 해체 작업 등 (연장작업)
6월2주차 (6.07 ~ 6.13)
6월3주차 (6.14 ~ 6.19)
6월4주차 (6.21 ~ 6.30)

□ 검토 결과

□ 작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 및 연장 근무 승인조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무 계획을 승인코자 함.

< 건설사업관리기술자 휴일 및 연장 근무 승인조건 >

- 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

- 연장작업에 소요되는 건설사업관리기술자 추가 대가 제외

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 소음․먼지․통행 불편 등 불편사항이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 본부 안전관리과에서 안전사고 위험 현장 지적․안내와 관련하여 지적사항은 즉시 조치하고, 반복 지적되지 않도록 현장관리 요망

- 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 및 연장 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

- [근로자 안전 10계명], [안전시공 10대 항목] 준수 철저

- 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 현장 안전관리 철저

※ 기배부한 코로나19 예방 및 확산방지를 위한 「사업장 대응지침」 및 「건설현장 대응 가이드라인」이행 철저.  끝.