문서번호	체육정책과-5731
결재일자	2021. 5. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	체육시설팀장	체육정책과장
김권웅	이외재	전결 05/27 이창현

-「서울 어울림체육센터」중앙투자심사 심사 대비 -

전문기관 컨설팅용역 재개 검토보고

2021. 5.

관 광 체 육 국

(체육정책과)

-「서울 어울림체육센터」중앙투자심사 심사 대비 -

전문기관 컨설팅용역 재개 검토보고

‘서울 어울림체육센터 건립 사업’ 타당성 재조사가 완료됨에 따라, 일시 중지하였던 ‘중앙투자심사 대비 전문기관 컨설팅 용역’ 을 재개하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울 어울림체육센터 중앙투자심사 2단계 심사대비 전문기관 컨설팅 용역

○ 용역기간 : 2020. 5. 28.~10. 26.

- 과업중지 : ’20. 9. 25.(잔여 31일)

- 중지사유 : 중앙투자심사 일정변경(타당성조사 이행 필요)

○ 계약금액 : ********

○ 계약업체 : ******************

○ 주요 과업내용

- 2단계 중앙투자심사 자료 작성

- 유지관리비용 최소화 및 수익창출 방안 마련을 위한 컨설팅 및 재산정

□ 추진경과

○ ’20. 5.28. : 용역착수

○ ’20. 7.29. : 중앙투자심사 의뢰(체육정책과→재정균형발전담당관)

○ ’20. 8.28. : 중앙투자심사 의뢰 철회(체육정책과→재정균형발전담당관)

- 사유 : 사업비 증가로 인한 타당성 조사 이행 및 중앙투자심사 재심사 대상

○ ’20. 8.31. : 타당성조사 의뢰서 제출

○ ’20. 9.25. : 용역 일시중지(타당성조사 완료 시까지)

○ ’20.10.27~’21.5.26. : 타당성조사 시행(한국지방행정연구원)

□ 과업재개 검토

○ 재개사유 : 타당성조사 완료 및 중앙투자심사 의뢰 추진

- 지방재정투자사업 타당성조사 약정기간이 ’21.5.26. 완료되어, 2021년 제3차 중앙투자심사 의뢰를 위한 투자심사의뢰서 작성 등 과업재개 필요

※ 재정균형발전담당관에 기 제출한 중앙투자심사 의뢰서 보완작성·제출 예정

○ 과업재개 일자 : 2021.05.27.(목)

○ 용역기간 변경

용역 착수일	당초 준공일	용역 중지기간	변경 준공일
’20.5.28.	’20.10.26. (과업기간 152일)	’20.9.25.~’21.5.26.	’21.6.26. (잔여일 31일)

□ 향후일정

○ 용역재개 통보(→재무과, 용역업체) : 즉시시행

○ 중앙투자심사서 보완 제출(→재정균형발전담당관) : ’21. 6월초

○ 3차 중앙투자심사 의뢰(市→행정안전부) : ’21.6.15.

○ 3차 중앙투자심사 개최(행정안전부) : ’21.8.13.  끝.