문서번호	도로보수과-3887
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
최우람		이수범	05/28 장상규
협조
	주무관		구준서

『2021년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사』관련

신규공법 적용에 따른 실정보고

2021. 5.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2021년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사』관련

신규공법 적용에 따른 실정보고

포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사 신규공법[5종, 상온경화형] 적용과 관련하여 차량 통제가 어려운 구간 작업시 문제점이 확인되어 아래와 같이 실정 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ ‘21년 노면표시 정비공사 시행계획 보고[도로관리과-4798호(2021. 3. 23)]

- 노면표시 시인성 개선을 위한 신규공법(5종, 상온경화형) 추진

Ⅱ		공사개요

□ 공사현황

연번	공 사 명	공사기간	공사규모	도급자	도급비(천원)	공정률
1	2021년 포장도로 정비구간 노면표시 유지보수공사(성동1구역)	’21. 4. 16. ~ 12. 31.	노면표시 78,824m	수색대원건설(주) 대표 강혜진	346,411	17.0%
2	2021년 포장도로 정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)	’21. 4. 21. ~ 12. 31.	노면표시 78,348m	태원건설(주)대표 김성원	319,824	15.5%

Ⅲ		추진현황

□ ‘21년 노면표시 시인성 개선계획 실시 (도로관리과-4798호, 2021.3.23)

- 대 상 : ‘21년 노후포장도로 정비공사 노면표시 복구구간

- 방 법 : 신규공법(5종, 상온경화형) 적용

※ 단, 차선에 한하여 적용[교차로 내부, 횡단보도, 문자‧기호는 기존공법(4종, 융착식) 적용]

Ⅳ		문제점 및 대책

□ 신규공법 적용에 따른 문제점

- 신규공법(5종, 상온경화형)은 경화시간이 약 15분 소요되어 교통 전면차단이 필요하나, 차량진출입시설 및 버스정류장 등에는 교통불편에 따른 안전사고 우려되고, 영업방해에 따른 민원발생의 문제점으로 인해 차선에 적용이 어려운 실정임

□ 대 책

- 주정차금지 황색 실‧점선 도색 등 측구인접 차선도색은 차량진출입시설 사용편의 및 택시 등 차량승하차 시민 안전을 위하여 현장여건에 따라 기존공법(4종, 융착식)으로 대체적용하고자 하며,

(단, 차량출입시설 및 이면도로 출입구가 연속적으로 없는 자동차전용도로와 유사한 구간은 대체적용 제외)

- 차로구분 실‧점선 등 일반 차선도색은 우회차로가 없어 차량 통제시 교통체증이 우려되는 구간, 임시버스정류소 설치공간이 어려운 구간, 서행을 위한 지그재그 차선 등 현실적으로 신규공법 적용이 어려운 구간에 한하여 기존공법(4종, 융착식)으로 대체적용하고자 함

Ⅴ		조치계획

□ 상기 보고내용과 같이 우선 정비하고, 추후 설계변경시 반영하여 정산처리 하고자 합니다.

붙임   ‘21년 노면표시 정비공사 시행계획 보고 1부.  끝.