문서번호	시설관리과-10014
결재일자	2021. 5. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
오영진		代오영진	05/28 고신석
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

(2020년-2차 동작,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

2021. 5.

남부수도사업소

(시설관리과)

	설계변경 심의위원회 개최결과 보고
(2020년-2차 동작,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

2020년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속) 시행 중 발생한 신규공종 및 시공물량 증․감 사항에 대하여 설계변경 사전 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2020년-2차 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

○ 공사 개요 : 제수변 정비 190개소, 변실 정비 76개소

○ 공사 기간 : 2020. 12. 04. ~ 2021. 5. 31.

○ 계  약  자 : ***********

○ 계약 금액 : ************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의 변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 변경사유 : 공사 시행 중 공사현장 여건 변화 및 배수지 유지관리 공사의 특수성으로 신규 공종 및 시공 물량 증․감 발생

********************************

*******************************************

*******************************************

○ 총 부기 변경 금액

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증·감	비고
총 부기금액	375,702,300원	375,540,000원	162,300원

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 개최 일시 : 2021. 05. 28.(목)10:00

○ 개최 장소 : 시설관리과(2층) 사무실

○ 심의 위원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설6급 서규석, 이일로, 김승완

- 간  사 : 시설6급 이강필

○ 심의 결과 : 본안 통과

- 계약변경 : 적정함

- 주요 공종 변경사항 : 적정함

-  세부 공종 조정내역 : 적정함

□ 제비율 검증(계약검증시스템)

○ 기술심사담당관에서 운영하는 계약금액조정 검증시스템 활용

○ 1차 제비율 검증(계약검증시스템)

-  검증결과 : 불합격

-  변경 계약금액 : 375,540,000원

-  상한 초과액 : 2,495,071원(수정상한액-373,044,929원)

※ 최초계약에서 주휴수당 포함된 요율과 동일한 요율 적용에 의한 오차

○ 2차 제비율 검증(계약검증시스템)

-  검증결과 : 합격

-  변경 계약금액 : 372,867,000원

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 물량 증․감 및 신규공종 발생으로 인한 변경내역에 대하여 설계변경 사전 심의위원회 심의결과에 의거 설계변경을 시행코자 함.

○ 제비율 검증에 의한 변경계약금액

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증·감	비고
총 부기금액	375,702,300원	372,867,000원	2,835,300원

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최 문서 1부.

2. 설계변경 심의의결서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.