문서번호	도시철도토목부-4839
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이형일		윤방식	05/06 정대현
협조
	주무관		한재호

구조물 내부비계 정산 관련 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」

구조물 내부비계 정산 관련 검토보고

본선 1, 2구간, 환기구(#1, #2), 정거장, 입출고선 등 구조물 공사의 내부비계가 설계에 미반영되어 있어 시공 후 정산에 따른 검토보고임.

※ 하남제20-334호(’20.4.16.)호와 관련임.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사

○ 공사개요 : 총연장 628.5m, 정거장 1개소, 환기구 2개소

○ 공사기간 : 2015. 3.30. ~ 2020.12.31.

○ 공사금액 : 95,415백만원

○ 도 급 자 : 한신공영㈜ 외 1개 사

○ 관 리 사 : ㈜동일기술공사 외 5개 사

2		추진경위

○ ’18. 2. 28. : 비계 및 안전발판 관련 원설계자 의견 요청

(관리단 ⇒ 원설계자)

○ ’18. 3. 22. : 구조물공 강관비계 및 비계다리 원설계자 의견 제출

(원설계자 ⇒ 관리단)

3		실정보고 내용

○ 실정보고 사유

1) 본선 구조물 내부 벽체[철근, 거푸집 조립, con'c 타설] 시공 위하여 내부비계 설치가 필요하나, 설계에 미반영

[하남선(5호선연장) 기본 및 실시설계 토목분야 적산자료Ⅰ(개착공법, 2014.10.)에 내부비계가 반영되어 있지 않음]

- 당초 : 본선 1, 2구간, 환기구(#1, #2), 정거장, 입출고선 구조물의 외부비계만 반영하고 내부비계는 미반영.

- 변경 : 본선 1, 2구간, 환기구(#1, #2), 정거장, 입출고선 구조물의 외부비계 및 내부비계 반영

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)

⇒ 사업주는 비계의 높이가 2m 이상인 작업 장소에 다음 각 호의 기준에 맞는 작업 발판을 설치하여야 한다.

○ 토목분야 적산자료 내용

- 구조물 외측 : 외부비계 반영 - 구조물 내측 : 동바리(상부슬래브 작업시 필요한 가설 받침), 내부비계 미반영

○ 설계 현황

1) 본선1구간 구조물 내부비계

< 단 면 도 >

당 초(설계)	변 경
외측비계 외측비계

2) 본선2구간 구조물 내부비계

< 단 면 도 >

당 초(설계)	변 경
외측비계 외측비계

3) 환기구 #1 구조물 내부비계

< 단 면 도 >

당 초(설계)	변 경
외측비계 외측비계

4) 환기구 #2 구조물 내부비계

< 단 면 도 >

당 초(설계)	변 경
외측비계 외측비계

5) 정거장 구조물 내부비계

< 단 면 도 >

당 초(설계)	변 경
외측비계 외측비계

6) 입출고선 구조물 내부비계

< 단 면 도 >

당 초(설계)	변 경
외측비계 외측비계

4		원설계자 의견

1) 설계 시 하남선 토목분야 적산자료 기준으로 수량 산출.

2) 현장여건에 따라 추가 발생되는 공정(내측비계, 작업발판)은 감리원, 감독관 협의 후 시공하기 바람.

5		수량 증·감 및 공사비 변경현황

○ 수량 증·감 현황

구 분		단위	수 량		증·감	비고
			당 초	변 경
강관비계	본선 1구간	㎡	-	935	935
	본선 2구간	㎡	-	528	528
	환기구 #1	㎡	-	2,505	2,505
	환기구 #2	㎡	-	1,877	1,877
	정 거 장	㎡	-	1,136	1,136
	입출고선	㎡	-	118	118
합 계				7,099	7,099

○ 공사비 변경 현황

(단위 : 천원)

구 분		공 사 비		증·감	비고
		당 초	변 경
강관비계	본선 1구간	-	13,188	13,188
	본선 2구간	-	7,447	7,447
	환기구 #1	-	35,331	35,331
	환기구 #2	-	26,473	26,473
	정거장	-	16,023	16,023
	입출고선	-	1,664	1,664
직접공사비		-	100,126	100,126
제 경 비		-	42,874	42,874
공 사 비 계		-	143,000	143,000

※ 단가적용기준 : 표준시장 단가 적용

→ 증가된 공사량의 단가는 예정가격 산정시 표준시장단가가 적용된 경우, 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 표준시장 단가로 함.[지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행안부 예규) 제7절 1.다.1)]

6		건설사업관리단 검토의견

○ 당초 설계시 하남선 토목분야 적산자료에 의거 구조물 외부비계만 설계에 반영됨에 따라, 미반영된 내부비계 정산 반영함이 타당하다고 판단됨.

○ 수량 및 단가 산출은 적정하게 적용되었으며, 추가 공사비(143,000천원)는 발주처 설계변경 소위원회 심의를 거쳐 설계반영함이 타당할 것으로 사료됨.

7		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 ‘구조물 내부비계 정산 검토보고’ 건에 대하여 건설사업관리단 검토의견과 같이 승인하고,

- 추가공사비 : (증) 143백만원

○ 향후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 설계변경시 정산·반영하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 현황사진 1부

2. 건설사업관리단 실정보고 각1부.  끝.