문서번호	광화문광장추진단-8612
결재일자	2019.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	광장계획팀장	광화문광장사업반장
진철웅	이강수	07/19 임창수

「새로운 광화문광장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역」

준공기한 연기 보고

2019. 7.

도시재생실

(광화문광장추진단)

「새로운 광화문광장에 따른 전략환경영향평가 용역」

준공기한 연기 보고

세종로 일대 도시관리계획 변경 협의 지연으로 「새로운 광화문광장 조성에 따른 전략환경영향평가 용역」의 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 새로운 광화문광장조성에 따른 전략환경영향평가 용역

○ 용역기간 : ‘18. 10. 5. ~ ’19. 7. 31.

○ 계약금액 : 51,765,000원

○ 계 약 자 : (주)대영이이씨

○ 과업내용 : 전략환경영향평가 실시 및 관련 절차 이행  등

□ 추진경위

○ ’18.10.04	용역계약 체결 및 과업수행

○ ‘18.10.18	착수 보고, 환경영향평가협의회 구성․운영 계획 수립

○ ‘18.11.08	평가준비서 서면심의 요청(12.06 심의완료)

○ ‘18.12.17~	결정내용 공개 및 의견수렴(14일간)

- 공개내용 :  전략환경영향평가 준비서(평가항목·범위, 심의의견 포함)

- 공개장소 :  서울시 홈페이지(http://www.seoul.go.kr)

환경영향평가 정보지원시스템(http://www.eiass.go.kr)

○ ‘19.03.04.	초안보고서 제출(대영이이씨→광화문광장추진단)

○ ‘19.04.04.	용역변경계약(용역준공기한 1차 연기)

- 당초 : ‘18.10.05.~‘19.04.04.

- 변경 : ‘18.10.05.~‘19.07.31.

□ 검토내용

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘18.10.05.~ ‘19.07.31.	‘18.10.05.~ ’19.11.29.	- 121일 연장 - 계약금액 변동없음

********

*****************************************************************************

○ 귀책사유 및 지체상금 부과여부

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ ‘19.  7.	용역준공기한 의뢰(광화문광장추진단→재무과)

○ ‘19.  8.	환경영향평가서(본안) 작성 및 협의(광화문광장추진단→한강유역환경청)

○ ‘19. 11.	용역 준공

붙임   1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.