문서번호	주거환경개선과-6455
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경사업팀장	주거환경개선과장
이동호		안근	05/18 김장수
협조

삼양마을공원 공영주차장 리모델링 공사 디자인감리 용역 재배정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

도시재생실

(주거환경개선과)

삼양마을공원 공영주차장 리모델링 공사

디자인감리 용역 재배정 계획

강북구청장으로부터 「삼양마을공원 환경개선공사」디자인을 최대한 반영하기 위해 디자인 감리비 요청이 있어 이를 검토하고 예산을 재배정하여 원활한 사업이 진행 되도록 추진하고자함.

※ 추진근거 : 공공부문 건축디자인 등 품질향상을 위한 디자인감리 제도시행【공공재생과-14123(2018.1.2.)】

- 도시재생본부 내 추진되는 모든 공공부문 건축물의 경우 2018년도 1월부터 디자인감리 도입

Ⅰ		사업개요 및 추진경위

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 삼양마을공원 환경개선공사

○ 위    치 : 강북구 삼양로 47길 15

○ 공사기간 : *******************

○ 총사업비 : ***************

○ 위치도 및 조감도

<위치도>	<조감도>

□ 추진경위

○ `18.09.21  삼양동 마을재생 추진계획(방침)

○ `19.03.18  삼양동 가꿈주택 시범가로정비 및 디자인기본계획 용역

○ `19.08.20~11.17  삼양마을공원 환경개선 실시설계 용역

○ `19.11.22  삼양마을공원 환경개선공사(건축·기계) 계약심사 결과 통보

○ `19.11.29  삼양마을공원 환경개선공사(소  방) 계약심사 결과 통보

삼양마을공원 환경개선공사(폐기물) 계약심사 결과 통보

○ `19.12.02  삼양마을공원 환경개선공사(전  기) 계약심사 결과 통보

삼양마을공원 환경개선공사비 시비재배정 요청

○ `19.12.03  삼양마을공원 환경개선공사비 재배정(****************)

○ `19.12.26  삼양마을공원 환경개선공사비 공사 착공

Ⅱ		세부추진계획

□ 디자인감리 용역개요

○ 용 역 명 : 삼양마을공원 공영주차장 리모델링 공사 디자인감리 용역

○ 용역기간 : 2020.7.31까지

○ 용역비용 :*****************

○ 과업의 범위

- 과업 위치 : 강북구 삼양로47길 15(삼양마을공원 공영주차장)

- 과업 규모 : 시설 및 주차 규모: 상부층(공원), 지하층(주차장 95면)

○ 과업의 내용

1) 기본업무

- 시공 및 유지관리 단계에서 설계자의 참여로 사업의 목표 및 방향, 디자인 등을 설계의도(설계안)대로 시공될 수 있도록 자문형태의 감리

- 자재, 장비 선정 등 디자인 품질검토

- 설계변경 시 자문 및 협의

- 시공상세도의 디자인 사항 검토 및 확인

- 건축시공 과정 중 의사결정 과정 참여

2) 세부업무

- 공사 품질에 대한 자문

- PC구조물에 대한 방향성 및 제작품질 검수

- 설계의도 구현을 위한 공정 순서에 대한 자문

- 현장여건에 따른 설계변경사항에 대한 디자인 검토 및 방안 자문

- 주요 공정에 따른 주 1~2회 현장 참여로 시공품질 향상 및 공정 단축자문

- 현장 레벨 및 배치 검토 및 자문

□ 검토의견

○ 상기공사는 삼양마을공원 환경개선공사로 당초 취지 목적 및 디자인을 최대한 반영하기 위해서는 디자인 감리용역이 필요하며

○ 아울러 본 공사의 경우 주차장 소음민원 해결 방안을 위해 계획변경이 불가피하게 필요하므로 기존 설계에 참여한 업체와 협의하여 추진함이   타당하다고 판단됨.

Ⅲ		예산집행계획

□ 재배정계획

○ 재배정액 :******************************

○ 예산현황

(단위 : 천원)

예산과목 및 내역		예산현액(A)	기배정액(B)	금회재배정 요구액(C)	배정잔액 (D=A-B-C)	비고
***********
	*** ********	*******	*******	******	******	****

- 주거환경개선과, 평생살고싶은마을만들기추진,주거지재생사업추진(도정),

관리형주거환경개선사업, 감리비(204-401-02)

○ 검토결과 : 상기 재배정액은 강북구 미아동 삼양마을공원 공영주차장  리모델링 공사 디자인감리 용역비로 원활한 사업추진을 위해 강북구청장에게 재배정 및 결정 교부코자함.

□ 향후계획

○ ‘20.5 예산 재배정 및 용역 착공

붙임  ***************

************************