문서번호	토목부-11011
결재일자	2020.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	06/05 김용제
협조

자연석경계석 규격 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 06.

도시기반시설본부

(토  목  부)

자연석경계석 규격 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(경계석 규격 변경)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

******************************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-112호(2020.06.02.): 실정보고건 제출(창덕궁 경계석 규격변경 건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.08.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 자연석경계석의 모굴림 및 미끄럼방지 처리에 대한 종로구 요구

○ 종로구 현장확인 점검시 보차도, 도로경계석에 대한 모굴림 및 미끄럼방지 처리 요청에 따라 설계에 반영 필요(관급자재 기 구매완료, 모굴림과 미끄럼방지 처리 제품이 없어 변경구매 불가)

○ 자연석경계석 규격변경 요청 내용

******		****	****	****
***	*****	**	***
	******	***	***
*****	******	*******	*******

□ 공사물량 및 공사비 증감 현황

○ 공사물량 및 단가 내역

****	****	***	***	**	**
***	**************	*	*****	***
	****** ************	*	*****	***	*****
	***************	*	*****	*****
*****	*******************	*	*****	***

○ 신규단가 적용

구 분	적용현황	비고
신규 비목	○ 협의율(92.827%) 적용 - 국가를 상대자로 하는 계약에 관한 법, 동 시행령, 동 시행규칙 및 공사계약 일반조건 제7절 1. 나항 “계약상대자의 책임없는 사유”에 해당 ※협의율 = (100+85.654) ÷ 2 = 92.827%

○ 공사비 증감현황

(단위 : 원)

*****		****	****	***
* * *	****	*	**********	**********
	*****	*	*********	*********
	*	*	***********	***********
*******		*	**********	**********

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 종로구청 현장확인 점검시 전체 규격에 대한 변경 요청 및 보차도경계석 미끄럼방지 관련 요청이 있어 전체구간 추가 반영하였으며,

○ 적용단가와 관련하여 3개 업체의 견적을 접수하여 단가차액 최저금액을 적용함이 합당하다고 판단되어지며, 추후 설계변경 시 반영·조치함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 종로구 요청에 따른 보차도, 도로경계석 모굴림 및 미끄럼방지 처리 사항으로 설계반영은 적정하다고 판단되며,

□ 우선 도급자에게 시행하도록 하고, 추후 설계변경시 반영하여 정산하고자 함.

붙임: 실정보고건(창덕궁 경계석 규격변경 건) 제출 공문 1부.  끝.