문서번호	토목부-10345
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	06/01 김용제
협조

도로원점 구간 배수시설 정비에 대한 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

2021. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

도로원점 구간 배수시설 정비에 대한 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

현장 점검시 지적된 도로원점 구간의 원활한 배수처리를 위하여 선배수로 측구를 설치하고 정산이 필요하여 검토 보고 드림.

*********************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 세종수 제2021-261호(´21.05.27.) : 도로원점 구간 배수시설 정비 승인

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 삼성본관 ~ 세종대로사거리

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021. 6. 30.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 도시기반시설본부 시설국장 현장 점검시 지적사항과 관련하여 도로원점 구간의 원활한 배수처리를 위하여 측구에 선배수로를 설치하고 내역 반영이 필요한 실정임.

○ 보도 선형 조정 현황

구 분

평면도 및 물량표

비 고

평면도

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
선배수시설	W750×H600×L2000	m	-	34	34
보차도경계석	200×250×1000	m	-	34	34
화강판석포장	T=50mm	㎡	-	10	10

호 텔

씨티투어버스

정류장

○ 공사비 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
***************
*****	*	**********	***********
***	*	*********	**********
****	*	**********	***********
*****	*	*********	**********
*****	*	**********	***********
*****	*	*********	**********
****	*	**********	***********

Ⅳ		조 치 의 견

○ 도로원점 구간의 원활한 배수처리를 위하여 정비한 사항으로 집중호우시 노면수 배수처리가 향상될 것으로 예상되는바, 상기와 같이 정산하여 설계변경시 내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토 공문 1부  끝.