문서번호	토목부-10286
결재일자	2021. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	토목설계과장	토목부장
홍현기	김동현	05/31 김용제

「광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업」

기본 및 실시설계 용역 자문회의 개최계획

2021. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업」

기본 및 실시설계 용역 자문회의 개최계획

현재 진행 중인「광화문역 연결 지하보행 네트워크 조성사업」기본 및 실시설계 용역에 대한 자문회의를 개최하고자 함

1		사업개요

○ 위    치 : 광화문역~종각역 지하보행통로 단절구간(청진공원~그랑서울)

○ 규    모 : 지하 공공보고 폭 8m, 길이 155m

○ 사업기간 : '20.6. ~ '22.12. (기본 및 실시설계 ’20.9.18. ~ ’21.9.17.)

○ 총사업비 : 107억원 (설계비 468백만원)

○ 용 역 사 : ㈜삼안 컨소시엄((주)삼안, ㈜태조엔지니어링, ㈜도진엔지니어링)

○ 위 치 도

2		추진경위

○ '19.9~12. : 타당성조사 및 기본구상 수립 용역/청진구역 정비계획변경 용역

○ '19.10.30. : 제2차 수시투자심사(조건부추진 2단계)

○ '19.11.06. : 시 도시계획위원회 심의(지하도로:중복/입체적 결정)

○ '20.01.09. : 청진 도시정비형 재개발정비계획변경 결정고시(시고시 제2020-34호)

○ '20.05.04. : 광화문일대 입체보행 지하 네트워크 조성사업 계획수립

○ '20.06.10. : 2단계 투자심사 완료(조건부:근입깊이 적정성 검토후 공사비 산정)

○ '20.06.23. : 기본 및 실시설계용역 발주계획 방침

○ '20.07.29. : 입찰공고

○ '20.09.02. : 입찰

○ '20.09.11. : 설계용역 계약

○ '20.11.25. : 착수보고회 개최

○ '20.12.~'21.5. : 현황측량 및 노선(안) 검토

3		자문회의 개최 계획

□ 자문회의 개요

○*****************************************

○*************************************

○*****************************

○ 참석대상

분 야		소속 및 직위	위 원 명	비고
위원장		도시기반시설본부 토목부장	김용제
간 사		도시기반시설본부 토목설계과장	김동현
외부	토질	㈜동해종합기술공사 사장	박윤규
	구조	서울과학기술대학교 정교수	김성곤
	구조	㈜한국구조물안전연구원 대표	이채규
내부		서울시 도시활성화정책팀장	정병익
내부		종로구 도로과장	정현석

- 발표자 : 설계용역 사업책임자(이상희 부사장, 삼안)

□ 주요 자문내용

○ 노선 선형에 대한 최적방안, 보행로 폭 등 자문

○ 공법(개착 또는 비개착)에 대한 안전성, 공사비 증액 등 검토

4		향후 추진계획

○  '20.11. ~ '21. 6.	: 기본 설계

○  '21. 6. ~ '21. 9.  : 실시 설계

○  '21.10. ~	: 공사 착공

○  '22.12.	: 공사 완료

붙임  1. 자문회의 자료 1부.

2. 자문의견서(양식) 1부.  끝.