코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	휘경 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기 알림

1. 방재시설부-6488호(2021.05.20.)와 관련입니다.

2.『휘경 CSOs 저류조 설치사업 기본 및 실시설계 용역』관련 아래와 같이 준공기한이 연기되었음을 알려드립니다.

가. 준공기한 연기 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총차분	`19.04.15. ~ `21.05.31.	`19.04.15. ~ `21.12.10.	증)193일
2차분	`20.01.01. ~ `21.05.31.	`20.01.01. ~ `21.12.10.	증)193일

붙임  1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 변경계약 통보(재무과 공문) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최용석		물순환시설팀장	이웅희		물순환정책과장	05/31 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-9985	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물순환정책과	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/	kr101092@seoul.go.kr	/	부분공개(5)