문서번호	급수운영과-8788
결재일자	2021. 5. 31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
서동민	서규석	이용구		05/31 박병성
협 조
	주무관		서장원

설계변경(3회-최종) 심사결과 보고

[2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)]

2021. 05. 31(월)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경(3회-최종) 심사결과 보고

[2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)]

「2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속 단가계약)」신규공종 및 계약물량 증․감에 따른 설계변경 심사를 마치고 그 결과를 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=13~300mm , L=2,223m

○ 공사기간 : 2020. 4. 8. ~ 2021. 6. 30.

○ 도 급 자 : 정일이앤지㈜  대표자 장인환

○ 도 급 액 : 금 666,465,400원

□ 설계변경 근거 및 사유

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

○ 공사 시행중 현장여건 변동에 따른 신규공종 발생 및 물량변동(증 ․ 감)

□ 설계변경 심의 요청

○ 심의기관 : 상수도사업본부 안전조사과

○ 심의내용 : 신규공종 및 계약물량 증감사항 심의

○ 심의요청 : 설계변경 심의요청(남부 급수운영과-8457(2021.5.26))

○ 심의회신 : 계약금액조정 결과 재통보(본부 안전총괄과-5193(2021.5.31))

□ 설계변경 심의 결과

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 신규공종 및 계약물량 변동 적정 여부 : 적정

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 계약금액조정 검토결과서 : 감 1,947천원

- 토공(잔토 및 환토 운반 등) 실 수량 확인 및 조정

- 싸인보드카(이동시 야간, 단위hr → 싸인보드카(정차시 야간, 단위 일))

○ 설계변경 요청 내용

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
도 급 비	666,465,400	726,836,000	증 60,370,600	증9.06%

○ 설계변경 심사 결과[최종]

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
도 급 비	666,465,400	724,889,000	증 58,423,600	증8.76%

○ 설계변경 세부 내용

- 주요공종 물량 증가내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
인력터파기(용수, 협소)	견질토사, 0-1m, 지세	㎥	667	1,146	증) 24,496,060
잔토처리 (0.7상차비별도)	24DT, 집하장 ->매립지(49.2km)	㎥	299	471	증) 3,290,188
벽체계량기 설치공	D=15mm	개소	724	1,115	증) 10,472,544

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
보호통 설치공	13~50mm	개소	90	147	증) 3,143,835
분기점 새들분수전 잠금	20~50mm	개소	104	160	증) 598,997
작업차량비	급수공사	건당	198	334	증) 5,991,208
안전원	급수공사	건당	151	249	증) 5,841,388
소켓(슬립인죠인트)	13mm~50mm	개	111	201	증) 2,169,099

- 주요공종 물량 감소내역

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
원형밸브실 설치공(기초CON)	D=80~300mm	개소	7	-	감) 2,672,822
대형계량기실 설치	D=75~300mm	개소	6	-	감) 11,514,533
보조기층공(지세)	t=10cm(10㎡미만) ~ t=20cm(10㎡이상)	a	6.89	5.41	감) 278,820
con’c인력비빔타설(지세)	t=5cm(옥내) ~ t=20cm(10㎡이상)	a	5.52	3.92	감) 5,535,772
가설급수장비 인입관 설치및철거	D=13~40mm	개소	5	-	감)181,986

□ 설계변경 시행 : 증액

○ 1,2차수 기성금액을 제외한 나머지 기성분에 대하여 계약금액을 천원단위로 절삭하여 진행하고자함.

○ 계약금액 변경(본부 심사에 의거)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
공급가액	605,877,637	658,960,000	증 53,082,363
부가가치세	60,587,763	65,896,000	증 5,308,237
도 급 비	666,465,400	724,856,000	증 58,390,600

□ 조치계획

○ 본부 설계변경 심사결과가 적정한 것으로 판단되는 바, 행정지원과에 변경 계약을 의뢰하여 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 1. 계약금액 조정 결과 통보. 1부.

2. 계약금액 조정 검토 결과서. 1부.

3. 설계변경내역서(심의조정) 1부.

4. 설계변경내역서(최종) 1부.  끝.