문서번호	기후변화대응과-7429
결재일자	2021. 5. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건물온실가스감축팀장	기후변화대응과장
전원석		최형준	05/31 이동률
협조

『남산창작센터 ZEB 리모델링』

설계용역 시행계획

2021.5.

기후변화대응과

「남산창작센터 ZEB 리모델링」설계용역 시행계획

『남산창작센터 제로에너지(ZEB) 리모델링』사업 설계공모가 완료됨에따라 당선자와 계약을 체결하여 설계용역을 시행하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 남산창작센터 제로에너지(ZEB) 전환 리모델링

○ 위    치 : 서울시 중구 퇴계로 26가길 82

○ 사업내용 : 그린 리모델링을 통해 남산창작센터 ZEB 5등급 이상 인증

- 규모/용도 : 지상2층, 1,966㎡(리모델링 1,836㎡ )/문화 및 집회시설

○ 사업기간 : 2020.6 ~ 2022.3

*************************************************

사업 대상지 위치	현황사진

□ 추진경위

○ ’20.06.12.       : 남산창작센터 ZEB 전환 사업계획 수립

○ ’20.6월~’21.3월 : 건축심의 등 사전절차 이행

- 사전검토(’20.7.7~8.6), 건축심의(’20.9.9~10.12), 구조안전진단(’21.1.21~3.21)

○ ’21.04.09.       : 설계공모 공고(도시공간개선단)

○ ’21.05.24.       : 당선작 선정(도시공간개선단)

***********************************

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 남산창작센터 제로에너지(ZEB) 전환 리모델링 설계용역

○ 용역기간 : ’21.6월 ~ 11월(착수일로부터 180일)

*******************

○ 계약방법 : 설계공모 당선자와 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 1항 4호 자목

**************************

○ 용역범위

- 건축·구조·토목·조경·기계·전기·정보통신·소방분야에 대한 기본 및 실시설계

- 각종 심의 및 관계법령에 의한 단계별 행정절차 이행

- ZEB 5등급 이상의 설계 및 인증 취득

- 과업내용서, 본 과업의 수행을 위하여 발주기관에서 계약자와 협의조정하는 업무 등

□ 추진일정

○ ’21.05월            : 설계용역 계약의뢰(재무과)

○ ’21.06월            : 설계용역 계약 및 착수

○ ’21.11월            : 설계용역 완료

○ ’21.12월 ~’22.3월  : 건설사업관리용역(감리) 및 공사 시행

붙임  1. 설계공모 결과 1부

2. 설계용역 과업내용서 1부

3. 설계용역비 산출 내역서 1부.  끝.