“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰[암사정수센터 수전전압변경 관급자재]

1. 기전설비과-3082호(2021.3.29.) 및 3899호(2021.4.20.) 관련입니다.

2. 『암사정수센터 수전전압 변경』 사업의 관급자재 계약금액을 아래와 같이 변경(연기)하고자 하오니 조달청에 계약의뢰해주시기 바랍니다.

가. 변경내용

건 명	계약자	계약기간 (변경없음)	계약금액 변경			비 고
			변경 전	변경 후	증·감
암사취수장 특고배전반 제작구매설치 (취수장특고반)	(유)다온시스 대표:유진순	’20.09.04∼ ’21.06.30	476,000	465,667	-10,333	12202114900
암사취수장 고압배전반 제작구매설치 (취수장고압반)	지투파워(주) 대표:장철수	’20.08.24∼ ’21.06.30	705,000	692,741	-12,259	12202107200
암사정수장 특고배전반 제작구매설치 (정수장특고반)	㈜은성엔지니어링 대표:김정현	’20.08.24∼ ’21.06.30	733,150	740,650	7,500	12202107300
암사정수장 고압배전반 제작구매설치 (정수장고압반)	골드텍(주) 대표:채희준	’20.08.20∼ ’21.06.30	929,000	953,000	24,000	12202104200
암사정수센터 프로세스제어반 제조구매설치	㈜종성테크 대표:임성규	’20.09.22∼ ’21.06.30	234,378	265,012	30,634	12202121700
합계			3,077,528	3,117,070	39,542	-

※ 이월예산(2,317백만원) 중 공사비 52백만원 감액 예정으로 공사비와 관급자재의 원인행위 금액만 상호간 조정

나. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 암사정수센터 수전전압 변경,

시설비및부대비, 시설비

다. 계약변경 사유 : 품목 추가·삭제에 따른 계약금액 증감 등

붙임  1. 방침서 2부.

2. 감리단 검토서 1부

3. 설계변경 내역서 5부.  끝.

	생산부장
주무관	김인준		기전설비과장	최강욱		생산부장	05/31 代신근호
협조자	주무관	채창옥		주무관	박상진		예산팀장	홍경숙
재무회계과장	代박상진		기획예산과장	박은섭
시행	기전설비과-5003	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1332	/전송	02-3146-1319	/	duulnet@seoul.go.kr	/	부분공개(3)