문서번호	시설과-2440
결재일자	2021. 6. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장	시설과장
김대영	06/01 박종수
협 조

- 보라매공원 노후시설 정비사업 폐기물 처리용역 - 설계변경 검토보고

2021.  6.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

- 보라매공원 노후시설 정비사업 폐기물 처리용역 -

설계변경 검토보고

「보라매공원 노후시설 정비사업 폐기물 처리용역」과 관련하여 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 보고 드림

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 보라매공원 노후시설 정비사업 폐기물 처리용역

❍ 용역내용 : 폐콘크리트 처리량 243톤, 폐아스콘 처리량 446톤

❍ 용역기간 : 2021. 4.13. ~ 2021. 6.11.

❍ ****************

❍ **********************

□ 설계변경 내용

❍ 설계변경 사항 : 본공사의 보행로 추가정비에 따른 폐기물처리 물량증가

❍ 물량 증·감 내역

공 종	단위	수 량		증 ․ 감		비고
		당초	변경
*********	*	***	***	**	**
********	*	***	***	**	**
*********	*	***	***	**	**
********	*	***	***	**	**

❍ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
* * *	****	**********	**********	***********
	***	*********	*********	*********
	*	**********	**********	***********

□ 조치계획

❍ 상기 물량증가에 따른 변경사항을 반영하여 설계변경 시행

❍ 사업비 증가예산은 본 사업의 집행잔액(낙찰차액 등)을 활용

붙임  변경내역서 1부.  끝.