문서번호	토목부-10404
결재일자	2021. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	06/02 김용제
협 조
	주무관			황윤기
	주무관			노순재

옹벽 수량 변경 정산 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2021. 05.

도시기반시설본부

토목부

옹벽 수량 변경 정산 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

옹벽 시공과 관련하여 설계도서 상호모순, 현장 여건 등으로 변경된 사항을 정산 · 반영하고자 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(동부간선) 2021-29호(2021.03.25.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명: 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모: 도로확장 4→6차로, 연장 1.45km

○ 도 급 비: 32,928백만원(8차: 12,411백만원)

○ 공사기간: ‘08.10. ~ ‘21.06.

○ 시 공 사 : 풍산건설(주) 외 1개사 / 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		감리단 검토내용

□ 설계도서 오류, 누락분 반영(대우감08-5호, ‘08.09.19.)

공 종	원설계		설계도서(최종) 수량(B)	증·감(△) (B-A)
	내역서(A)	수량산출서
콘크리트타설	5,377㎥	5,370㎥	6,723㎥	1,346㎥
거푸집조립	15,949㎡	15,925㎡	16,457㎡	508㎡
철근가공조립	502.970ton	513.656ton	648.323ton	145.353ton
비계	3,923㎡	3,923㎡	6,841㎡	2,918㎡
스페이셔	14,264EA	14,266EA	14,934EA	670EA
드레인보드	3,138㎡	3,138㎡	3,080㎡	(△)58㎡
부직포	3,145㎡	3,145m	3,293m	148m
스치로폼	248㎡	248㎡	302㎡	54㎡
다웰바	1,042EA	1,042EA	1,142EA	100EA
실런트	776m	776m	625m	(△)151m
수팽창고무지수재	1,112㎡	1,112㎡	1,446㎡	334㎡
사급자재비(철근)	518.706ton	529.835ton	590.095ton	71.389ton
사급자재비(레미콘)	5,483㎥	5,475㎥	6,015㎥	532㎥

□ 현장여건에 따른 변경사항

○ 보행육교(한내교) 설치에 따른 옹벽 기초 보강

- 보행육교 교각 간섭으로 인하여 옹벽 기초 보강(4m → 5m)

구 분	당 초	변 경
전개도
단면도

○ 사업계획변경(전구간 지하화)에 따른 옹벽 형식 변경

- 2공구 전구간 지하화에 따라 1공구 접속부 도로 폭이 변경(7→8차로)되어 일부 옹벽 형식 변경(역T형→켄틸레버형)

구 분	평 면 도 & 단 면 도
당 초
변 경

○ 경원선 철도 이설구간 삭제

- 경원선 철도 이설공사에서 시공된 옹벽을 삭제하고 성토부 안전성 확보를 위하여 일부구간에는 자연석 쌓기 시공

구 분	평 면 도
당 초	보강토옹벽 L=160m
변 경	조경석 L=30m

구 분	당 초	변 경
단면도 A-A’
단면도 B-B’

○ 옹벽 7구간(본선 의정부 방면) 연장

- 하계교 교각으로 인해 굽어있는 산책로(자전거 도로) 직선화를 위해 옹벽 7구간 25.5m 연장(노원구청 요청사항)

구 분	당 초	변 경
평면도
단면도

□ 수량 및 공사비 증·감 현황                          (단위 : 천원)

공 종	규 격	당 초		변 경		증·감(△)
		수 량	공사비	수 량	공사비	수량	공사비
비탈면 안정공	자연석쌓기	-	-	15m	3,881	15m	3,881
구조물공	콘크리트타설	5,638㎥	53,627	6,723㎥	66,315	1,085㎥	12,688
	거푸집	15,926㎡	253,964	16,519㎡	265,880	593㎡	11,916
	철근가공조립	519.628ton	157,753	648.323ton	211,511	128.695ton	53,758
	비계	4,637㎡	58,684	6,841㎡	93,770	2,204㎡	35,086
	배수시설	1식	15,632	1식	15,486	1식	(△)146
	시공이음	843㎡	20,009	1,200㎡	29,762	357㎡	9,753
	강관파일	-	-	551m	107,679	551m	107,679
	보강토옹벽	680㎡	148,287	-	-	△680㎡	(△)148,287
	사급자재비외(철근,레미콘)	1식	434,632	1식	557,613	1식	122,981
직 접 공 사 비		1식	1,142,588	1식	1,351,897	1식	209,309
간 접 공 사 비		1식	383,263	1식	431,930	1식	48,667
물 가 변 동 액		1식	459,149	1식	406,173	1식	(△)52,976
도 급 액			1,985,000		2,190,000		205,000

□ 단가검토

구 분	주 요 내 용	비고
신규비목	○ 강관파일천공 외 14개 공종 : 협의율(83.982%) 적용 - 지방계약법 시행령 제74조 제4항 3호에 의거 계약대상자의 책임 없는 사유 - [67.965%(낙찰율) + 100%(설계가)] / 2 = 83.982% ○ 유로폼 외 1개 공종 : 실적단가(100%) 적용	적정

Ⅲ		조치계획

□ 감리단의 검토의견과 같이 설계도서 누락 및 현장여건 등으로 변경된 사항에 대하여 정산 반영하는 것이 타당하므로 승인 조치하고 추후 설계변경 자문회의를 거쳐 설계내역에 반영하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 1부.  끝.