문서번호	토목부-10406
결재일자	2021. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		최진우	06/02 김용제
협조

서울광장 배수관 부설에 대한 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

2021. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

서울광장 배수관 부설에 대한 검토보고

[세종대로 도로공간 재편사업(1구역)]

서울광장 앞 보도 확장부 빗물받이 연결관 부설시 기존 지장물(전기 및 통신 등)의 저촉으로 별도의 유도 배수관을 부설하고 정산이 필요하여 검토 보고 드림.

***************************************

Ⅰ		관 련 근 거

○ 세종수 제2021-278호(´21.05.31.) : 시청광장 앞 배수관 변경 승인 요청

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

○ 위    치 : 삼성본관 ~ 세종대로사거리

○ 규    모 : 차로축소, 보행공간 및 자전거도로 조성

○ 공사기간 : 2020. 07. 16. ~ 2021. 6. 30.

○ 도 급 비 : 6,422백만원

○ 시 공 사 : 국정종합건설(주)외 2개사

○ 감 리 사 : 수성엔지니어링외 1개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 시청광장 앞 보도 확장 부분에 빗물받이 연결관 부설시 지하 지장물(전기 및 통신 등)의 저촉으로 굴착이 불가능하여 기존하수관에 연결이 어려운 실정으로 원활한 배수를 위해 종방향으로 신설 하수관을 설치하고 내역 반영이 필요한 실정임.

○ 평면도 및 현황사진

구 분

평면도 및 물량표

비 고

평면도

품 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비고
우수관 부설	D=450mm	m	-	52	52

서울광장

서울시청

○ 공사비 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
*************
*****	*	*********	**********
***	*	*********	**********
****	*	*********	**********
*****	*	*******	********
*****	*	*********	**********
*****	*	*	*
****	*	*********	**********

※ 신규공종 강재협의율 적용 : 94.147%

Ⅳ		조 치 의 견

○ 보도 확장부 빗물받이 연결관 부설시 지하 지장물로 공사가 불가능한바, 원활한 배수처리를 위하여 유도 배수관 설치는 적정하므로 추후 설계변경시 내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토 공문 1부  끝.