문서번호	기전과-4453
결재일자	2021. 6. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		석대창	06/02 변봉섭
협조
	주무관		이태근

『2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제1차 작업완료 검토결과 보고

2021.  6.

『2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제1차 작업 실정보고 검토 보고

『2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』 제1차 작업지시와 관련, 감리원으로부터 제출된 실정보고에 대한 검토결과를 보고 드림.

		관련근거

□ 제1차 작업지시

○ 1차 작업지시 : 기전과3734(2021.5.11.)

□ 제1차 작업지시 관련 실정보고

○ 감리업체 : ㈜인스펙트, 2106-남부01호(2021.6.2.)호

		공사개요

□ 공 사 명 : 2021년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관할지역(금천, 관악, 동작구, 서초, 영등포 등)

□ 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 유지보수

□ 계약금액 : ************

□ 시 공 사 : **************

□ 감 리 사 : *****************

□ 제1차 작업지시 내용 : 총 32건

○ 작업기간 : 2021. 5. 11. ~ 6. 4.

○ 규    제 : 20건 – 동작구 알마타로 53앞 횡단보도표지 설치 등

○ 일상보수 : 12건 – 금천구 시흥대로 471-1 직진금지표지 설치 등

		작업 완료결과

□ 제1차 작업결과 : 총 32건(완료 10건, 미완료 22건)

○ 규제사항 : 20건(완료  5건, 미완료 20건)

○ 일상보수 : 12건(완료  5건, 미완료 12건)

<주요 작업내용> - 세부사항 “별첨”

지시 번호	구 분	위 치	작 업 내 용	작업 결과	비고
1-14	규제 사항	관악구 문성로 203	#217 설치 2개소 #보조표지(난곡터널구간) 설치 1개소	완료
1-16	규제 사항	서초구 우면동 730	#329 신설 2개소	완료
1-17	규제 사항	금천구 가산동 238-48 앞	#329 신설 1개소	완료
1-19	규제 사항	우면동 434-1	#224 신설 1게소 #보조표지(램프구간) 신설 1개소	완료
1-20	규제 사항	서초구 염곡사거리	#224 신설 4개소 #보조표지(우회전부) 신설 4개소 #427(시속 30Km 해제) 신설 1개소	완료
1-23	일상 보수	서초구 서초역 사거리	#보조표지(차량정체시 진입금지) 설치 1개소	완료
1-24	일상 보수	반포대교	#220(40t) 교체 1개소 #220(10t) 교체 1개소 #220(10t) 교체 3개소 #보조표지 일산방향 유턴고가 10톤초과 진입금지) 신설 3개소	완료

□ 미완료 작업사항 : 22건

지시 연번	구분	위 치	작업지시 내용	미완료 사유
1-1	규제 사항	동작구 알마타길 53앞	#322 신설 2개소	기 설치 완료
1-2	규제 사항	동작구 상도로52길 일부구간 (상도로)	#213 신설 #328 신설	기 설치 완료
1-3	규제 사항	사평대로 반포전화국(연등)R, 반포전화국R(양방향)	#322 신설 4개소	기 설치 완료
1-4	규제 사항	남부순환로 유니모전자R, 신성택시R, 경남아파트 앞R (양방향)	#322 신설 8개소	기 설치 완료
1-5	규제 사항	동작구 양녕로 283(정동병원 앞)	#322 신설 1개소	기 설치 완료
1-6	규제 사항	동작구 여의대방로 10길 24(대방중교 앞)	#322 신설 2개소 #329신설1개소	선행공사 미완료(노면표시)
1-7	규제 사항	한남대교 남단	#125 신설 3개소 #보조표지(전방100m신호등설치)신설1개소 #보조표지(전방65m신호등설치)신설1개소 #보조표지(전방25m신호등설치)신설1개소	선행공사 미완료(신호기)
1-8	규제 사항	교보타워사거리(강남대로)	#차로별 신호운영 보조표지 신설 16개소	선행공사 미완료(신호기)
1-9	규제 사항	논현역 사거리(강남대로)	#차로별 신호운영 보조표지 신설 8개소	선행공사 미완료(신호기)
1-10	규제 사항	교육개발원입구~영동1교(강남대로)	#315(차로안내표지) 신설 2개소	교통안전표지 규격 재협의 필요
1-11	규제 사항	신원동 374 서초포레스타501동 앞	#221(높이제한, 원형900) 4.5m 설치 1개소	선행공사 미완료(신호기)
1-12	규제 사항	양재동 101 양재초등학교 후문 앞	#221(높이제한,원형900) 4.3m 설치 1개소	규제사항 미 설계
1-13	규제 사항	관악구 낙성대로 새마을식당 앞	#329 신설 1개소 #보조표지(직진신호시좌회전가능)신설1개소	기 설치 완료
1-15	규제 사항	서초구 양재동 102∼102-6 (양재도서관∼양재리본타워)	#322 이설 4개소 #202이설1개소 #221이설1개소 #112이설1개소 #329이설1개소	선행공사 미완료(노면표시)
1-18	규제 사항	금천구 범안로 독산현대아파트입구 연동 교차로	#329 신설 2개소	기 설치 완료

1-21	일상 보수	시흥대로 471-1	#212 신설 1개소	기 설치 완료
1-22	일상 보수	가산동 139 디지털2단지사거리 방향 지주	#보조표지(차량정체시 진입금지) 신설 1개소	위치 및 표지 규격 협의 필요
1-25	일상 보수	관악로 164앞	#보조표지(07:00~21:00 토요일 공휴일 제외 로) 교체	대형안내표지 교체에 따른 별도 협의 필요
1-26	일상 보수	독산동 997-14 앞	#525(대형) 제거 1개소	대형안내표지 철거에 따른 별도 협의 필요
1-29	일상 보수	반포고가	#312(높이제한, 원형900) 3.7m 설치 2개소 #224 신설 2개소	상세 위치도 확인 필요
1-30	일상 보수	가산동 614-72 철산대교	#525(대형) 제거 1개소	상세 위치도 확인 필요
1-31	일상 보수	가산동 535-121	#226(높이제한, 원형900) 3.7m 설치 1개소	상세 위치도 확인 필요

□ 감리원 검토의견

○ 금회 1차작업 대상 32건 중 10건을 완료하였으며 미완료 작업지시 22건은 기 완료 또는 선행공정 미시공(노면표시, 신호기) 및 상세도면, 위치도 재 확인이 필요함에 따라 금회 작업지시에서 제외 하고자 함.

- 미완료 작업지시 : 22건

· 기 완료 작업지시 : 8개소

· 선행공정 미시공(노면표시, 신호기) : 6개소

· 상세도면, 위치도 확인 및 재협의 필요 : 8개소

		보고자의견

□ 감리원 작업완료 보고에 대한 검토 결과

○ 제1차 작업지시 총 32건 중 10건을 완료하였으며 미완료 사항 22건은 현장여건에 따라 작업이 불필요한 사항으로 금번작업에서 제외코자 하며,

○ 경찰청 규제심의 사항 및 일상 유지보수 공사는 계속 실시하여 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

붙임  감리원 1차 작업지시 실정보고 1부.  끝.