투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	‘2021년 상반기 한강공원 편의시설 확충·정비 공사‘ 설계변경 시행 및 계약의뢰

1. 녹지관리과-3936(2021. 6. 2.)과 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인「2021년 상반기 한강공원 편의시설 확충·정비 공사」와 관련, 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명: 2021년 상반기 한강공원 편의시설 확충·정비 공사

나. 위    치: 여의도한강공원 전역

다. 공사내용: 노후 막구조 그늘막 17개소 철거

라. 공사기간: 2021. 5.24. ~ 6. 2.

마. 계약금액: ***********************

바. 도급업체: ******************

사. 설계변경 사유: *******************

아. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		6,237,000	4,730,000	- 1,507,000
도급비	공급가액	5,670,000	4.300,000	1,307,000
	부가가치세	567,000	430,000	130,700
	계	6,237,000	4,730,000	- 1,507,000

자. 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 이용시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 검토 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부.

3. 검증 확인서 1부.

4. 합의 각서 1부.  끝.

	녹지관리과장
주무관	박준혁		녹지관리과장	06/02 곽영만
협조자
시행	녹지관리과-3948	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 공원부 녹지관리과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0848	/전송	02-3780-0745	/	forsythia@seoul.go.kr	/	부분공개(5)