“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가)-3회)

우리사업소에서 시행중인 『2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회-최종) 계약의뢰를 요청드립니다.

가. 공 사 명 : 2020년 대학동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : 정일이앤지(주) 대표자 장인환

다. 계약기간 : 2020. 4. 8. ~ 2021. 6. 30

라. 공사개요 : D=13~300mm, L=2,223m

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총부기금액	***********	***********	************
1차수금액	***********	***********	*	2020년
2차수금액	***********	***********	************	2021년

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증,감

사. 예산과목 : 상수도사업비용.영업비용,급수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비

소방용수시설등의 설치 및 관리,소방용수시설등의 설치 및 보수

붙임  1. 설계변경 심의결과보고 및 변경내역서 1부.

2. 심의의결서 및 합의서 각1부.

3. 설계변경 시행문 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	서동민		급수운영팀장	代박행종		급수운영과장	06/02 이용구
협조자
시행	급수운영과-8928	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(7)