문서번호	기전과-5673
결재일자	2021. 6. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이지영		배수웅	06/03 이규상
협조

『2020년 횡단보도 확충사업(국기원입구 교차로)』

사업지점 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6. 3.(목)

동부도로사업소

(기전과)

『2020년 횡단보도 확충사업(국기원입구 교차로)』

사업지점 변경 검토 보고

2020년 횡단보도 확충사업(국기원입구 교차로) 관련하여, 교통운영과로부터 접수된 사업지점 변경 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 예산 재배정 알림(횡단보도 확충정비)

○ 교통운영과-8002호(2021.6.1.)

- 재배정 예산 : 25,860,950원(명시이월예산)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2020년 횡단보도 확충사업(국기원입구 교차로)

□ 사업내용 : 국기원입구 교차로 대각선횡단보도 설치

□ 사업기간 : 2020. 11. 02. ~ 2021. 12. 28.

□ 계 약 자 : ㈜극동파워테크 대표 배철한

□ 계약금액 : 금25,860,950원(금이천오백팔십육만구백오십원정)

3		추진경위

□ ‘20.09.11 : 규제심의 요청(국기원입구 교차로)

□ ’20.09.    : 교통규제 및 실시설계 병행 추진

□ ‘20.09.21 : 대각선 횡단보도 설치를 위한 실무회의(교통운영과, 동부도로사업소)

□ ‘20.09.22 : 사업시행부서 예산배정 완료

□ ‘20.10.13 : 2020년 횡단보도 확충사업(국기원입구 교차로) 입찰공고

□ ‘20.10.19 : 개찰완료[(주)극동파워테크 배철한]

□ ‘20.12.22 : 계약변경(준공기한 연기)

4		사업지점 변경 검토

□ 변경사유

○ 서울지방경찰청 교통안전시설 규제심의위원회 심의 지연으로 연내 착공, 준공 불가하여 사업지점 변경

□ 변경내역

○ 당 초

연번	추진근거	사업위치	사업비(원)	사업규모	계약기간	비고
		규제심의 요청
1	교통운영과-14252 (2020.09.11.)	강남구 국기원입구 교차로	25,860,950	신호지주 신설 2본, 신호등 신설 7조 등	2020.11.02. ~ 2021.12.28.	규제심의 보류 중
		대각선 횡단보도 신설 등

○ 변 경

연번	추진근거	사업위치	사업비(원)	사업규모	계약기간	비고
		규제심의 결과
1	교통관리과-6540 (2021.03.31.)	강남구 압구정역 사거리	25,860,950	신호지주 신설 3본, 신호등 신설 4조 등	2020.11.02. ~ 2021.12.28.
		2단 횡단보도 및 보행신호기 신설 등

- 추진현황도

당 초(강남구 국기원입구 교차로)	변 경(강남구 압구정역 사거리)

5		검토 의견

□ 보행불편 해소를 위한 횡단보도 확충사업 지점 변경 검토 결과 서울지방경찰청 교통규제심의 지연으로 연내 착공, 준공 불가하여 사업지점 변경이 적정한 것으로 판단됨

6		조치 계획

□ 금년 내 사업 완료를 위하여 사업지점(강남구 국기원입구 교차로→ 압구정역 사거리) 변경을 승인하고 변경계약을 관리단속과에 의뢰하고자 함.

붙 임 : 예산 재배정 공문 1부.  끝.