문서번호	기전과-6030
결재일자	2021. 6. 4.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	서부도로사업소장
곽영두		서수일	06/04 김영철
협 조
	주무관			정영술

「2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업

(한강대교북단 외 6개소)」

추진 계획

2021. 6.

서부도로사업소

(기전과)

「2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업

(한강대교북단 외 6개소)」 추진 계획

2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업의 일환으로 한강대교북단 외 6개소 신호기, 표지 공사를 추진하여 안전한 교통환경을 구축하고자 함

1		추진 근거

□ 2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정(1차 알림)

○ 서울시 교통운영과-7332호(2021.5.17.)

2		사업 개요

□ 사업구분 및 사업비

○ 교통신호기 공사(6개소) -	*********
○ 교통신호기 관급자재 구매 -	********
○ 교통표지 공사(7개소) -	*********

□ 사업위치 (총 7개소)

○ 용산구(2) : 한강대교북단 / 녹사평역 교차로

○ 중  구(2) : 장충체육관 / 동대문역사문화공원사거리 교차로

- 동대문역사문화공원사거리 교차로 1개소는 교통표지 공사만 수행

○ 마포구(3) : 서교동 / 서울가든호텔 / 이대입구 교차로

※ 상세는 붙임 1. 공사위치도 참조

3		사업별 세부내용

□ 교통신호기 공사

○ 사 업  명 : 2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기 공사

(한강대교북단 외 5개소)

○ 공사내용(총 6개소)

******************************

********************************

○ 사 업 비 : *********

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

- 근거 : 지방계약법 시행령 제20조 1항 6호, 동법 시행규칙 제24조 1호 다목

○ 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록을 한 업체로서, 입찰일까지
(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

○ 공사기간 : 착공일부터 150일

□ 교통신호기 관급자재 구매

○ 사 업 명 : 2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 구매내역 : 교통신호등 4종, 교통신호등주 7종

품명	규격	수량	단위	비고
교통신호등	**********	**	*	세부내역 붙임 참조
	**********	**	*
	**********	**	*
	**************	**	*
교통신호등주	*****************	**	*
	************	*	*

○ 사 업 비 : ********

○ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

○ 관련법률

- 조달사업법 제11조 1항, 동법 시행령 제11조 1항 2호 가목

※ 붙임 3. 관급자재 구매계획 참조

□ 교통표지 공사

○ 공 사 명 : 2021년 교통사고잦은곳 개선사업 교통표지 공사

(한강대교북단 외 6개소)

○ 공사내용 : 총 7개소 교통표지 신설, 이설 등

○ 사 업 비 : ********

○ 계약방법 : 1인수의계약

- 근거: 지방계약법 시행령 제25조 1항 가목(추정가격 2천만원 이하 공사)

************************

○ 선정사유 : 표지공사 경험 풍부한 업체로서 원활한 공사 추진 도모

○ 공사기간 : 착공일부터 60일

4		예산 개요

○ 예산내역

구분	금액(천원)	비고
계	307,532	예산 재배정액
교통신호기 공사	*******	6개소 신호기 설치
교통신호기 관급자개	******	신호기 관급자재 구매
교통표지 공사	******	6개소 표지설치
이전비	******	굴착복구비, 이설비 등

○ 예산과목

- (교통사업특별회계) 도시교통 체계 및 소통 개선, 교통소통 및
안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

5		향후 추진 계획

□ 2021. 6. : 교통신호기 공사·관급자재 계약 의뢰 및 시행

□ 2021. 8. : 교통표지 공사 계약 의뢰 및 시행

□ 2021. 10. : 준공

붙임  1. 공사위치도 1부.
2. 교통신호기 및 표지 공사 설계내역서 1부(신호 설계도면 포함).

3. 관급자재 구매계획 1부.  끝.·