문서번호	기전과-4080
결재일자	2021. 6. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		문준호	06/04 이재권
협조

『금호터널 외 4개소』

노후 조명시설 개선공사 계획

2021. 6.

성동도로사업소

(기 전 과)

『금호터널 외 4개소』

노후 조명시설 개선공사 계획

금호터널 외 4개소의 노후 조명시설을 LED조명등으로 교체하여 안전사고 예방 및 에너지 절감에 기여하고자 함.

1		추진근거

□ 기전과-4076(2021.6.4.)

○ 2021년 노후 조명시설 개선공사 추진계획

2		시설현황

연번	시설명	계	터널등	가로등
계		1364	1278	86
1	금호터널	520	NH250W 204등 NH150W 70등 LED100W 246등	-
2	성동지하차도	160	NH250W 128등 NH150W 20등	LED150W 12등
3	능산지하차도	400	MH250W 368등	MH250W 32등
4	응봉지하차도	185	NH250W 132등 NH150W 36등	MH200W 10등 NH250W 7등
5	중랑지하차도	99	NH250W 65등 NH150W 9등	CMH200W 25등

3		추진계획

□ 사업개요

◌ 사 업 명 : 금호터널 외 4개소 노후 조명시설 개선공사

◌ 사업목적 : 노후 조명시설 개선을 통해 안전사고 예방 및 에너지 절감에 기여

◌ 사업대상 : 금호터널, 성동지하차도, 능산지하차도, 응봉지하차도, 중랑지하차도

◌ 기    간 : 2021.6.~2021.10.

◌ 소요예산 : ***************

(***************, *****************)

◌ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 조명시설 개선, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 사업내용

◌ 노후 방전등램프→LED조명으로 교체(설치 수량 감소)

연번	시설명	개선 전(방전등)		개선 후(LED)		비고
		터널등	가로등	터널등	가로등
		250W 이하	250W 이하	100W	100W
	계	1032	74	916	74
1	금호터널	274	-	246	-
2	성동지하차도	148	-	132	-
3	능산지하차도	368	32	304	32
4	응봉지하차도	168	17	162	17
5	중랑지하차도	74	25	72	25

4		세부추진계획

□ 전기공사

◌ 공 사 명 : 금호터널 외 4개소 노후 조명시설 개선공사

◌ 공 사 비 : *********

◌ 공사기간 : 착공일로부터 70일

◌ 공사내용 : 방전등 등기구 1106등 철거, LED등기구 990등 설치

- 경찰청 도로작업허가 및 구청 도로점용허가 승인 후 시행

※ 추후 교통상황에 따라 야간공사로 변경 가능

◌ 계약방법 : 제한경쟁입찰 발주(지역제한)

- 지방계약법 시행령 제20조 제1항 제6호에 의한 전기공사업에 따른 전기공사

- 참가자격 : 전기공사업법 제4조 제1항에 의한 전기공사업 면허등록업체로서 주된 영업 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

□ 관급자재

◌ 관 급 비 : *********

※특정기술심사위원회 선정 또는 다수공급자계약 2단계 경쟁에 따라 관급비 유동적

◌ 구매방법 : 조달구매(4개 업체로 분리발주)

구매업체	A사	B사	C사	D사
시 설 명	금호터널	성동지하차도	능산지하차도(터널등)	응봉지하차도 중랑지하차도 능산지하차도(가로등)
구매방법	제3자단가	제3자단가	제3자단가	다수공급자계약 2단계 경쟁

- 구매예산이 1억 이상인 경우 : 다수공급자계약 2단계경쟁

▶ 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2(다수공급자계약)

- 구매예산이 1억 미만인 경우 : 제3자단가(특정기술심사위원회 개최)

◌ 구매기준 : 고효율에너지기자재 인증 및 한국표준규격(KS) 여부

◌ 업체 선정방법 : 표준평가방식Ⅱ(제안가격 적정성 평가 : A형)

- 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 2억원 미만인 경우

- 평가 배점기준

구 분	평가항목	평가지표	배점
2억원 미만 표준평가 (Ⅱ)	가격	제안가격의 적정성	65점
	적기납품	납기지체여부	20점
	사후관리	계약이행실적평가	5점
	품질관리	조달청 및 전문기관검사, 품질점검 결과	10점
	신인도 (-1.75 ~+2.5)	불공정행위 이력 평가 결과	-0.25점
		최저임금 위반	-0.5점
		임금체불	-0.5점
		고용개선조치 미이행	-0.5점
		고용우수기업	+1점
		일자리 으뜸기업 인적자원개발(HRD) 우수기업 정규직 전환 우수기업	+0.5점
		기술 인증	+1점

◌ 철거품 : 서울시 자원순환과 SR센터에 무상양여

(서울특별시 사회적기업 육성에 관한 조례 제2항)

※ 사업소 내 보관장소 협소로 철거품 발생시마다 SR센터 양여

4		행정사항

□ 조명계획 수립

◌ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리 조례 제22조

◌ 빛방사허용기준 및 야간경관가이드라인을 반영하여 조명계획 수립

□ 특정기술 선정심사위원회 개최

◌ 서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제3조

	제3조(심사 대상 및 범위)
◌ 공사 사업의 경우 가. 동일 특정제품의 재료원가 합계금액이 5천만원 초과 - 공사사업의 관급자재(부가세 제외금액) 구매의 경우도 포함 나. 동일 특정공법의 공종별 순공사원가(제경비, 부가가치세 제외) 합계 금액이 1억원 초과 ※ 조달청 다수공급자계약 2단계경쟁 대상인 경우는 심사 대상사업에서 제외

◌ 코로나19 대응 사회적 거리두기에 따른 서면 심의

5		향후일정

◌ 2021.6. : 특정기술 선정심사위원회 개최

◌ 2021.6. : 관급자재 구매 의뢰(관리단속과)

◌ 2021.6. : 전기공사 계약 의뢰(재무과)

◌ 2021.7.~10. : 공사 시행 및 준공  끝.