문서번호	방재시설부-7377
결재일자	2021. 6. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
박용도	현학범	06/07 박홍봉

『세종대로 도로공간 재편사업(1구역)』

조경분야 실정보고 사항 검토 보고

2021. 6.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『세종대로 도로공간 재편사업(1구역)』

조경분야 실정보고 사항 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『세종대로 도로공간 재편사업(1구역)』 조경분야 실정보고 건에 검토하여 보고 드림.

- 근거: 세종수 제2021-290호(2021.6.3.)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 세종대로 도로공간 재편사업(1구역)

▢ 위    치 : 세종대로 사거리 ~ 서울역 교차로

▢ 규    모 : 보행친화공간 L=1.55km(양방향 8~12 → 6~9차로)

- 사업내용 : 보행로, 자전거도로, 가로숲․녹지조성, 편의시설 설치 등

▢ 공사기간 : 2020.7.16. ~ 2021.6.30.

▢ 도급비 : **********************

▢ 도급사 : 국정종합건설(조경시공사: 건탑산업개발)

▢ 감리사 : 수성엔지니어링

< 위 치 도 >

Ⅱ		건설사업기술자 검토내용

▢ 검토배경

❍ 세종대로 도로공간 재편사업 1구역 조경공사 실시설계내용 반영 및 실정보고 사항에 따라 진행 중 2021년 1월 ~3월까지 발주처 현장점검 및 현장여건 변경에 따른 지시사항을 확인하고 설계에 반영코져 함.

▢ 검토내용

❍ 1구역 전구간 현장점검 지적사항 반영 검토

- 전 구간 초화류 및 관목, 교목을 공간디자인에 부합되도록 현장 반영

❍ 1구역 1단계 현장점검 지적사항 반영 검토

- 기존 불량 가로수 보호판 정비,

- 시청역 주변 사철나무 보식 및 지피류를 회양목으로 변경 등

❍ 1구역 2단계 현장점검 지적사항 반영 검토

- 청계광장 소나무 규격상향 조정 및 소나무 하부 관목 식재

- 일민미술관 앞 토심확보 어려운구간 현황에 맞게 녹지정비

- SFC앞 녹지조성불가지역 이동식 플랜터 설치로 변경 등

❍ 1구역 3단계 현장점검 지적사항 반영 검토

- 시의회 앞 소나무(특수목) 식재, 녹지대 면적 변경 및 식물플랜터 설치로 경관 향상

- 덕수궁 앞 답압지역 지피류 관목으로 교체, 기존 불량가로수 보호판 추가교체 등

▢ 공사량 증감 대비

구분	검토 내용	비고
수량산출검토	․ 기존교목, 신규교목, 관목지피 수량 산출 별도 검토	붙임참조

▢ 단가산출서 검토

구분	검토 내용	비고
****	*****************************************************************************************************************************************
기존품목	․ 기존단가 적용

▢ 공사비 증감 대비표

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
****
*****	*********	*********	******
***	*******	*******	*****
*******	*********	*********	******
*****	******	******	******
*******	*********	*********	******

▢ 건설사업관리기술자 검토의견

❍ 조경공사 실시설계내용 반영 및 실정보고 사항에 따라 진행 중 2021년 01월 ~ 04월까지 발주처 현장점검 및 현장여건 변경에 따른 지시사항(1차~12차)을 반영하는 것은 타당하다고 판단되며,

❍ *************에 대하여는 본부 승인 후 추후 설계변경시 반영코자 함.

Ⅲ		검토결과

▢ 본 실정보고 건은 「세종대로 사람숲길 조성공사」 실행중 현장 여건변경 및 현장점검 중 지시한 사항 등을 설계변경에 반영하고자 하는 사항으로,

▢ 건설사업관리기술자의 검토의견이 타당하므로 이를 인정하고, 설계변경시 정산․반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임: 관련공문(세종대로 도로공간 재편사업(1구역)조경공사 실정보고(4차) 승인요청) 1부. 끝.