문서번호	건축부-8680
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
박지영		차무흥	06/08 이창구
협 조
	주무관			고병준

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

실정보고(CAP BEAM 보강)에 대한 검토보고

2021. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』

실정보고(CAP BEAM 보강)에 대한 검토보고

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』관련 실정보고서 검토보고가 건설사업관리단으로부터 제출되어 검토보고 드림.

**************************************************

1		사업개요

위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 9

규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711.05㎡

용    도 : 공장, 업무시설, 제1종근린생활시설

*********************************************************

************************************************

시 공 사 : 세이브건설(주) 외 2개사

2		추 진 경 위

'20.06.30. : 공사 착수

'20.07.31. : 지상 지장물(기존 건물) 철거

'20.11.20. : CIP천공 완료

'21.03.26. : 터파기 공사 완료

'21.06.현재 : 지하2층 골조(벽체) 공사 중

3		실정보고 내용

관련근거

○ ****************************************************************

○ *************************************

○ “지방 자치단체 입찰 및 계약집행기준” 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사의 설계변경 2.설계서의 정정•보완 나 1)

실정보고 사유

○ ******************************************************************************************************

○ 공사 실시내용

공사비 증감 내역

구 분	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감
************	*	*********	*********
******	*	*********	*********
*****	*	*********	*********
*****	*	*********	*********
**	*	**********	************

○ 단가 적용 검토: 지방자치단체 제13장 공사계약일반조건 제7절 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정에 의거

- 일위대가 구성시 노무비는 2021년 상반기 노임단가를 적용.

- 계약에 있는 비목 수량 증감된 부분에 대한 단가적용은 “계약단가”를 적용.

- 신규품명, 신규단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정된 단가에 낙찰율(86.76%)을 적용.

- 일위대가 구성이 없는 비목은 견적처리(각재).

- 신규재료비 단가는 거래가격, 유통물가, 조사가격 중 최저가 선택(케미칼 앙카).

4		감리자 검토의견

광역소공인 특화지원센터 건립공사 인접현장 간섭관련 CAP BEAM 보강설치에 따른 실정보고 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

5		처리의견

*********************************************************************************************************************************

*****************************************************************************.

붙 임 : 실정보고 검토결과서(건설사업관리단) 1부.  끝.