문서번호	도로보수과-5105
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	도로보수과장
황태선	최완	06/08 이화신

작업지시 (3차) 완료  보고

『2021년 도로부속물일상유지보수공사(연간단가)』

2021.  6.

북부도로사업소

(도로보수과)

『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업지시(3차) 완료 보고

우리사업소에서 시행중인「2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)」와 관련 3차 작업지시가 완료되어 이에 검토 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명: 2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)-북부

∘ 공사개요

- 도로부속물 세척 : 8,500㎡

- 과속방지턱 도색 : 1,222㎡

- 옹 벽 보 수     :    35㎡

∘ 총공사비: *********

****************

∘ 도 급 자:*******************

▢ 3차 작업완료 내용

∘ 작업기간: 2021. 05. 18. ~ 06. 07.

∘ 작업구간: 강북구 도봉로 외 4개 노선(노원로, 정릉로, 월곡로, 한천로)

공종	단위	정비물량(㎡)		증·감
		작업지시	작업완료
보도용블럭 설치	㎡	19.50	13.09	감)6.41
장애인블럭 설치	㎡	29.91	31.23	증)1.32
갈매기표지 설치	개	12	12	-
도로반사경 설치	개	2	2	-
무단횡단금지시설 설치	경간	10	-	감) 10
무단횡단금지시설 철거	경간	7	7	-
시선유도봉 설치	개	276	276	-
도로표지병 설치	개	202	202	-

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	기 작업완료 (1~2차)	3차 작업완료	잔 액	비 고
도급비	309,726	157,586	23,672	128,468
관급비	20,000	-	-	20,000
이전비	22,204	11,916	-	10,288
총공사비	351,930	169,502	23,672	158,756

▢ 조치계획

∘ 『2021년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 시공물량을 반영하여 실정산하고자 함.

붙임   1. 작업완료 사진대지(별도) 1부.

2. 작업완료 보고서 1부.

3. 작업완료 내역서 1부.  끝.