문서번호	도로보수과-2640
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
이종호		한정환	06/08 박문희
협조

설계변경(제1차) 검토보고

[2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

강서도로사업소

도 로 보 수 과

설계변경(제1차) 검토보고

우리 사업소에서 시행하는『2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 감리사부터 설계변경 검토서가 접수되어 아래와 같이 설계변경사항을 검토하여 보고 드림

※ 관련문서: 설계변경(제1차) 내역서 제출-**********************)

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사규모 : **************************

❍ 공사기간 : 2021.03.23. ~ 2021.12.31.

❍ 도 급 비 : ************

❍ 도 급 자 : ***********

❍ 감 리 사 : ************

❍ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로

정비공사, 시설비및시설부대비, 시설비

2		설계변경사항

❍ 도로교통 소통개선 및 교통사고 잦은곳 개선 사업 예산 재배정에 따른 조속한 사업 추진을 위해 기 계약된 연단단가 업체에 작업 지시하여 교통사고 사전 예방 및 원활한 차량 통행을 개선하고자 함.

※ 예산 재배정 현황                                   (단위: 원)

예산과목	당 초	변 경	증 ․ 감
노후포장도로정비공사	***********	***********	*
도로교통 소통개선	*	**********	**	**********
교통사고 잦은곳 개선	*	**********	**	**********
합 계	***********	***********	**	**********

※ 관련공문

- 도로교통 소통 개선사업(교통운영과-6766, 2021.5.6.)

- 교통사고 잦은곳 개선(교통운영과-7332, 2021.5.17.)

❍ 노면표시공사 실 작업량 반영에 따른 물량 조정

※ 주요 변경사항

제경비	단위	당초	변경	증․감
백색 차선도색(수동식)	m	*******	*******	**	*****
황색 차선도색(수동식)	m	******	******		*
청색 차선도색(수동식)	m	*****	*****	**	***
분홍색 차선도색(수동식)	m	**	*****	**	*****
차선제거(건식 흡입형)	m	*****	******	**	*****
차로밑 그림(수동식)	m	******	******	**	******
합 계		*******	*******	**	******

❍ 공사비 증감 내역                                      (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	***********	***********	************
부 가 세	**********	**********	***********
도 급 비	***********	***********	************

3		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 건설사업관리기술자(감리)에서 검토 보고한 설계변경사항을 반영하여 설계변경 후 정산 처리하고자 함.

붙임 : 1. 건설사업관리기술자 설계변경 내역서(제1차) 제출 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.