문서번호	급수운영과-11928
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
급수관리팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
권기섭	유동수	06/08 이재호
협 조
	주무관		정석균

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

배수지 관랑실 내 노출배관 도장공사 계획 보고

2021. 6.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

배수지 관랑실 내 노출배관 도장공사 계획 보고

』

배수지 관랑실 내의 노출배관 도장이 벗겨지고 부식 상태가 심화 되고 있어 부식 방지와 내구성 향상으로 시설물 유지관리의 효율성 및 안정성을 확보하기 위한 도장공사 계획을 보고드림.

1				현황

□ 공사예정 노출배관 현황

구분	준공년도	구경(㎜)	면적(㎡)	전체면적(㎡)
대현산배수지 1지	2002.	300～1650	1,769	4,522
대현산배수지 2지	2002	300～1650	1,385
아차산배수지	1993	500～1500	1,368

□ 배관 현황

대현산배수지 관랑실 관로 녹발생	대현산배수지 유입관로

2				추진 계획

□ 사업 개요

○ 소요 예산

사업명	면적(㎡)	소요예산(천원)	사업비(천원)
대현산배수지 1지 상수도배관 도장공사	1,769	965,000	2,475,000
대현산배수지 2지 상수도배관 도장공사	1,385	765,000
아차산배수지 상수도배관 도장공사	1,368	745,000

○ 예산 과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비

□ 특정(공법)기술 내용

구분	STS-316L 파우터코팅	에폭시 계열 슈미터코팅	Ceramic 계열
장점	내수·내약품성 강함 반영구적	가격이 저렴	- 에폭시보다 자외선에 강하나 탈색이 진행되어 사용 수명이 제한적임
단점	가격이 고가	페인트계열로 내수 ·내약품성 약함 자외선에 취약하여 쉽게 탈색 사용 수명이 짧음	가격은 중간정도임

□ 추진 일정

○ 예산 편성 자료 제출: 2021. 6. 9.

〈예산 확정 후 일정〉

○ 특정기술 선정심사 위원회 심사: 2022. 1.

○ 계약심사: 2022. 2.

○ 발주 및 계약: 2022. 3.

○ 사업시행: 2022. 3.~2022. 12.

붙임  1. 도면 각 1부

2. 내역서 각 1부.  끝.